문서번호	토목부-13389
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		최광무	07/11 노우성
협조

- 구리암사대교 연결도로 건설공사 -

보강토 옹벽 시공계획승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 구리암사대교 연결도로 건설공사 -

보강토 옹벽 시공계획승인 검토보고

선사로~고덕지구간 도로확장공사구간에 매설된 암사정수장 광역 상수도관로(2,200mm) 보호를 위해 위 공사의 종단 계획고조정으로 절․성토량이 변경됨에 따라 보강토옹벽을 민자사업 개통에 차질이 없도록 시공계획을 보고드림

공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012. 8. 2. ～ 2014.12.31.

○ 도 급 비 : 18,161백만원

○ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

종단계획 변경 현황

암사정수장

암사대교

정수장사거리

서원마을

변경 계획고

당초 계획고

sta. 1+740

sta. 2+180

당초 : 토공사면

변경 : 보강토옹벽(262m)

PRN옹벽(2구간)

당초 : 152m(622㎡)

변경 : 43m (181㎡)

PRN옹벽(1구간)

당초 : 175m(1,098㎡)

변경 : 175m(1,100㎡)

추진현황

○ 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사에서 암사정수장의 광역 상수도관로 보호가 필요하여 본 공사 구간의 종단 계획고 변경이 불가피한 상태임

- 상수도관로 규격 : 직경 2,200mm

- 종단계획고 변경 : 최대 높이 4.1m

- 종단 변경 길이  : 연장 560m

○ 종단 계획고가 변경됨에 따라 절․성토량 및 보강토 옹벽 규모가 변경이 필요하여 공사기간 변경이 필요함.

주요 변경내용

위 치	공 종		공사규모		개략공사비(백만원)
			당 초	변 경	당 초	변 경	증,감
STA. 1+620 ∼ 2+180	PRN 옹벽	1구간	H=3.7m,L=175m A=1,098㎡	H=5.3m, =175m A=1,100㎡	621	630	9
		2구간	H=9.3m,L=152m A=622㎡	H=5.1m,L=43m A=181㎡	350	103	-247
	보강토옹벽		-	H=5.3m,L=262m A=1,101㎡	-	434	434
	토공	절토	43,100㎥	27,700㎥	276	265	-11
		성토	47,500㎥	71,700㎥	49	72	23
		-	유용토 4,400㎥	사토 44,000㎥	-	-1,071	-1,071
합 계					1,296	433	-863

기술지원감리원 보강토 옹벽구조 검토결과

○ 블록식 및 PRN옹벽 설계는 경제적이고 안정적으로 적정하게 검토 된 것으로 판단됨

○ 블록식 보강토 옹벽 및 PRN옹벽 기초 지반에 대해서는 충분한 수량의 평판 재하 시험을 실시하여 소요 지지력 확보 여부를 정밀 검토 하여야 함.

○ PRN옹벽 구간등 옹벽 배면부에 약품 저장탱크가 위치하는 구간에 대해서는 옹벽 시공중, 시공 후 적정기간 약품 탱크의 변형(침하 및 측방이동)량에 대해 정밀 계측을 실시하여 과다 변형이 예상되는 경우 별도의 안정 대책을 수립 하여야 할 것으로 판단됨

감리단 검토의견

○ 선사로의 변경설계 도서에 대한 계약 변경 심의절차 완료시 까지는 상당 기간이 소요될 것으로 예상되며, 금년 11월 개통에 공기가 촉박함으로 선사로에서 시행한 설계 도서를 시공사에 공식적으로 제공하여 검토하도록 하고 이에 따라 우선 시행하도록 승인함이 타당한 것으로 사료됩니다.

○ 다만, 상기 변경 내용으로 선 시공하되, 절감되는 공사비 약 –863백만원에 대해서는 추후 설계변경 심의결과에 따라 공사비 확정시 계약 변경하는 조건으로 시공사에 승인 통보함이 타당함.

조치 계획

○ 상기 책임감리원 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계 변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨.

- 개략공사비 : 감)863백만원

붙  임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.