문서번호	시설관리과-16703
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
오정훈	정임근	07/11 이시우
협 조
	주무관		이철구
	주무관		강무진

대현산배수지

인테리어 공사에 따른 에어컨 구매검토 보고

2014. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

대현산배수지

인테리어 공사에 따른 에어컨 구매검토 보고

우리사업소에서 현재 진행중인 “대현산배수지 인테리어 공사”건에 대한 시설관리공단 실정보고 의견에 따라 에어컨 (2대)를 조달청 “3자단가”로 구매 하고자 하였으나, 아래와 같은 사항이 발생되어 검토 후 보고 드림.

□ 관련근거

□ “공사실정 보고” 시설관리과-14949(‘14.6.25)

□ 공단 실정보고 내용

□ 공단의견 ”대현산배수지내 인테리어 공정”에 포함된 에어컨 설치는       조달청(3자단가)구매시 예산절감이 가능하여 발주처(사업소)에서 조       달구매가 타당한것으로 보고 됨.

- 에어컨 구매(설치) 비용 비교검토

(단위:천원)

품 명	시공사 설치비용	조달청 구매설치 비용	비 고
벽걸이형 에어컨(7평)	1,337	590	감 747
시스템 에어컨(40평)	3,660	3,500	감 106
적 용		공단실정 보고	감 853

□ 자체 검토

□ 검토배경

- 공단의견에 따라 에어컨(2대)를 조달발주 코자하였으나, 현재까지

조달청 나라장터에 시스템 에어컨이 등재되지 않아, 발주가 지연되어       후 공정(통합감시제어설비 구축)에 막대한 지장이 초래되어 공사의        시급성을 감안하여 “자체시장 가격조사”를 검토하였음.

□ 시장조사 방법

- 인터넷(www.lgsac.co.kr) → LG휘센 시스템에어컨 특판

- 조사일 : ‘14.07.10(10:00)

- 견적서 제출자 : LG전자 신원식   (☎ 032-812-3850)

- 시장가격 : 붙임 참조

□ 에어컨구매 비용 비교검토

(단위:천원)

품 명	공단 제시 금액	자체 시장조사 금액	비 고
	조달청 구매설치 비용	견적가
벽걸이형 에어컨(7평)	590	580	감 10
시스템 에어컨(40평)	3,500	3,400	감100
계	4,090	3,980	감110
적용금액	4,090	3,702 (협의율 93.37% 적용)	감388

※ 기본설치비(배관5m)외에 배관 등 추가되는 비용은 별도

□ 검토의견

- 현재 시스템에어컨이 조달청 3자단가 품목에 등재되어 있지 않고,  또한 자체 시장조사 결과 공단에서 조사한 조달구매 금액보다    제조사의 “자체시장조사 금액”이 약388천원 절감 되므로,  원활한 후속 공정관리를 위해 시설관리공단으로 하여금 재 검토 요청.

□ 협조사항

□ 시설관리 총괄

- 시설관리공단에 “조달구매”에 대한 재 검토 요청

〈추가 검토 요청사항〉

- 1층에 설치된 에어컨을 2층 장비실에 이설 (장비보호용)

- 2층 장비실 공간부족으로 주방쪽 칸막이 1M 이전 설치

- 환풍기 4대 설치 (장비실 1대, 주방 1대, 화장실1대, 관리실 1대)

- 시스템박스(콘센트) 신설

- 복도 외벽쪽 인테리어(목공) 설치

- 중앙제어실 출입 앞 복도 LED 조명(50W)×2개 추가 설치

- 중앙제어실 출입문 유리 필름 설치 등

따로붙임 : 견적서 1부. 끝.