함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(최종)시행(2013년 종로 성북구 관내 긴급누수복구공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『2013년 종로 성북구관내 긴급 누수복구공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 종로 성북구관내 긴급 누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 :*************

다. 계약기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31(총 공사부기기간 : 2013.06.25~2014.06.30)

라. 설계변경 내용 : 물량 증․감 및 신공종 발생

마. 설계변경 내역

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증․감
도급비 (VAT포함)	**************	**************	**************

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선교체비,기타교체비

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 결과보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이유찬		주무관	이태원		시설관리과장	代최명익		중부수도사업소장	07/11 안운길
협조자	주무관	현경선
시행	시설관리과-18741	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충동2가 208-1	/
전화	02-3146-2222	/전송	02)3146-2239	/		/	부분공개