문서번호	수도자재관리센터-13032
결재일자	2014.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
김흥식		조현외	07/11 성시영
협조

고품질 계량기 외부표시장치 설치 공사중지 검토보고

[80,100mm - 엠앤에스]

2014.  07.

고품질 계량기 외부표시장치 설치  공사중지 검토 보고

▢. 관련근거

- 서울특별시재난안전대책본부-70(2014.07.05,장마대비 중안재난안전대책본부장        특별지시시 알림)호와 관련

- 엠앤에스 –20140711(201407.11,고품질 수도계량기 외부표시기 현장설치 공        사중지 요청)호와 관련

▢. 계약건명 : 고품질 수도계량기(80~100mm) 구매설치

-계약일시 : 2013.10.31

-납품기한 : 2014.04.30

▢. 계약업체 : 엠앰에스(주), 대표 홍성완, 경기도 군포시 소재

▢. “현장설치” 공사중지 기간

- 중지기간 : 2014.07.11.(금)부터 ~ 2014.08.11.(월)까지

- 대상 : 표시장치 현장설치 74개(총설치대상량)

【구매설치시방서 제12조(현장설치)】

○ 기존 기계식 수도계량기 철거, 고품질수도계량기 설치 등은 서울시에서 시행한다.

○ 외부표시기 설치(콘크리트 타설 또는 앵커로 고정), 수도계량기와 표시기간 전선(관)

시공 등은 수도계량기 납품업체에서 시행한다.

○ 외부표시기는 서울시에서 지정한 지정된 장소에 설치하며, 외부충격에 의해 변형되지 않도록

견고하게 고정시켜야 한다.

○ 표시기설치, 결선작업, 연동상태 확인, 조정 등은 수도계량기 설치사실을 통보 받은

후 10일 이내에 작업완료 하여야 한다.

○ 수도계량기와 표시기간의 전선(관)은 미관을 고려 최대한 매립하며 직선으로 시공한다.

○ 수도계량기와 표시기간의 전선(관) 및 표시기 시공 후 잔재물을 청소하여야 하며, 주변은

공사하기 전과 근접한 모양이 유지되도록 마감처리 하여야 한다.

▢. 공사중지 검토결과

- 고품질 수도계량기 외부표시기 판넬함은 야외에서 기초콘크리트 작업 과 센서선        보호관 매립작업을 해야 하는바 장마기간(금년도는 24년만 도래한 늦은 장마) 및       폭서기가 도래하여 현장설치 작업시 안전과 견고한 설치작업의 어려움이 있어 추       후 부실시공 등이 우려 되는바  『장마기간 및 폭서기간 고품질계량기 판넬함 현장       설치 공사중지』를 시행하여 부실시공에 대비하고 안전하고 원활한 현장공사 시행에       만전을 기하고자 함.

▢. 조치사항

〇 현장설치 공사중지사항을 납품업체에 즉시 통보 시행.