투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 서부공원녹지사업소 질서유지관리용역 설계변경(2차) 시행

1.  공원운영과-11808(2014.7.11)호와 관련입니다.

2.  우리 사업소 2014년 서부공원녹지사업소 질서유지관리용역에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 서부공원녹지사업소 질서유지관리용역

나. 계약기간 : 2014. 3. 1. ~ 2015. 2. 28. (12개월)

다. 계 약 자 : ㈜다보산업관리 (대표 정채열)

라. 설계변경 내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
계 약 금 액	614,315천원	615,755천원	증 1,440천원
계 약 기 간	2014.3.1~2015.2.28	2014.3.1.~2015.2.28 (7.12~8.31) 17일 추가	변경 없음
근무 인원	주간 690명 야간 5,048명 심야 244명	주간 707명 야간 5,048명 심야 244명	주간 증 17명
합 계	5,982명	5,999명

마. 산출내역 : 금1,440천원

- 평화잔디광장 안내소 : 84,760원 × 17일 × 1명 = 1,440천원

바. 설계변경사유

- 평화잔디광장 안내소의 청원경찰 주간 근무자 공백으로 비수기(7월~8월) 주말 및 공휴일 질서유지관리용역 근무자 1명 증원

사. 추가 소요예산

- 예산금액 : 1,440천원

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소운영, 서부공원녹지시사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비,

공공운영비(월드컵공원 질서유지용역)201-02

※ 예산집행잔액 활용(확보예산-618,000천원)

아. 시행일자 : 2014. 7. 12.

붙 임 : 1. 2014년 질서유지관리용역 과업 및 설계변경(2차) 방침서 1부

2. 2014년 질서유지용역 과업지시서(2차) 1부

3. 2014년 질서유지관리용역 설계 변경내역서(2차) 1부.  끝.

주무관							안현웅				주무관					이일광					주무관					代이수정					총무팀장						조기환
공원운영과장							조준수				서부공원녹지사업소장					07/14 신시섭
협조자
시행			공원운영과-11938										(						)		접수												(						)
우	121-250					서울 마포구 월드컵로 243-60(마포구 성산동 390-1)																/			http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화		02-300-5525							/전송			02-300-5527					/	atsign@seoul.go.kr													/	부분공개