문서번호	도로시설과-12386
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		한강교량팀장	도로시설과장
김귀용		하현석	07/14 이용심
협조

성산대교 용접부 비파괴시험 실시계획 보고

(강재 부식두께 조사 포함)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시안전실

(도로시설과)

성산대교 용접부 비파괴시험 실시계획 보고

(강재 부식두께 조사 포함)

성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역 시행중 구조안정성 검토를 위하여 용접부 결함상태를 조사하기 위한 비파괴 시험과 강재의 부식두께 조사계획에 대한 용역사 보고사항에 대한 검토보고 사항임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

○ 개    요 : 구조안전성 검토, 기본 및 실시설계(L=1,455m, B=27~39m)

○ 용역기간 : 2013.11.1 ~ 2015.4.24 (1차 계약기간 : 2014.12.31)

○ 용 역 비 : 2,206백만원(1차 1,850백만원)

○ 용 역 사 : ㈜평화엔지니어링 외 3개사

□ 추진경위

○ 2013.11. 1  :  설계용역 계약 및 착수

○ 2013.11.18  :  발주처 및 용역사 합동 현장조사

○ 2013. 2.21  :  장래 교통량 예측 및 분석보고

○ 2013. 5.19  :  FCM부재(ECB) 관련 피로해석 및 관리방안 자문회의

○ 2013. 6.26  :  외부전문가 자문회의

□ 용접부 비파괴 시험 및 강재 부식두께 조사 필요성

○ 공용중인 성산대교의 용접부 결함 및 강재부식의 상태등을 고려한 구조 안전성 검토시 기초자료로 활용하고 성능개선사업의 신뢰도 향상 및 향후 유지관리시 기준 자료로 활용

○ ECB부재는 신축이음부 하단에 위치하여 누수로 인한 강재부식의 우려가 높고 붕괴유발 부재로서 특별 관리가 필요하며, 수직재와 사재는 2011년 보수공사 후 강재부식 재발생여부를 확인하여 구조안전성 검토에 참고

□ 용접부 비파괴 시험내용

○ 비파괴 시험위치 선정

- ECB : 붕괴유발부재 이므로 용접불량 및 진행성 균열을 파악하기 위해 전수 조사실시

- 트러스 구간 상현재, 수직재 및 사재, 현수구간은 인장응력 및 교번응력을 받는 부재의 용접부는 전체 경간장(S4~S13)중 S9경간을 샘플 조사

- 전체 경간중 S9경간을 선정한 이유는 동일경간이 반복되어 있고 전경간 조사시 기간과 비용이 많이 소요되므로 기 조사된 비파괴 시험에서  불량률이 높고 용접불량 형태도 타 경관에 비해 다양하여 S9경간을 샘플경간으로 선정조사

○ 조사 대상 수량

- UT(초음파탐상검사) : 274개소

- MT(자분탐상검사)   : 760개소 중 380개소

(육안조사후 균열이 예상되는 위치를 선정하여 전체 수량의 50%실시)

※ 용접부 비파괴 시험 및 부식두께 조사계획서 붙임 참조

□ 강재 부식두께 조사내용

○ 부식두께 조사위치

- ECB : 신축이음부 하단에 위치하여 누수로 인한 부식의 우려가 높고 붕괴유발부재임을 감안하여 전수 조사실시

- 수직재 및 사재는 S9경간을 샘플대상으로 선정하여 2011년 보수공사 후 부식 재발생여부를 확인조사 실시

- 지점부 하현재는 본교 전체의 모든 지점부 하현재를 대상으로 부식두께 조사실시

○ 조사 대상 수량     : 140개소

- 트러스 구간     :  52개소(하현재 36개소, ECB 16개소)

- 사재 및 수직재 :  88개소(사재 48개소, 수직재 40개소)

※ 용접부 비파괴 시험 및 부식두께 조사계획서 붙임 참조

□ 검토사항

○ 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역 시행중 용접부 결함상태를 조사하기 위한 비파괴 시험과 강재의 부식두께 조사가 필요하며

○ 용접부 비파괴 시험 및 강재 부식두께 위치 및 수량 : 조사계획서(붙임) 참조

○ 비파괴 시험 및 강재 부식두께 조사 소요기간 : 약 2개월

○ 소요예산 : 93,500천원

□ 조치사항

○ 용역사에서 보고한 용접부 비파괴 시험 및 부식두께 조사계획서 검토결과 적정하므로 승인 통보하여 용접부 비파괴 시험 및 강재 부식두께 조사를실시하여 용역수행에 따른 구조안정성 검토에 참고코자 하며

○ 비파괴 시험 및 부식두께 조사에 소요되는 비용(약 93,500천원)은 향후 설계변경시 정산반영코자 함

붙 임  1) 용접부 비파괴 시험 및 강재 부식두께 조사계획서 1부

2) 용접부 비파괴 시험 위치도(S9경간) 1부.  끝.