문서번호	방재시설부-7285
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
박용도	代김달용	05/22 박홍봉

『강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사』

염곡사거리 주변 식재계획 변경 실정보고 검토보고

2020. 5.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사』

염곡사거리 주변 식재계획 변경 실정보고 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사』와 관련하여 염곡사거리 주변 식재계획 변경 실정보고 사항에 대하여 검토 보고 드림.

- 근거: 동기강 2020-146호(2020.5.14.)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사

▢ 위    치 : 서초구 우면동~과천시 주암동~강남구 수서동

▢ 규    모 : 폭4~10차로, 연장 7.96Km,(교량 0.48Km, 지하차도 2.79Km(4개소))

▢ 공사기간 : 2002.7.3. ~ 2022.12.31.

▢ 사 업 비 : 3,617억원(조경 60억원)

▢ 감리사/도급사 : ㈜동명기술공단/롯데건설(주)외 1개사

Ⅱ		건설사업기술자 검토내용

▢ 검토목적

❍ 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 중 염곡동서지하차도 상부도로 복구를 위한 주변 가로수 식재공사를 시행함에 있어, 당초 6~7년전 현장내 존치된 가이식장의 수목을 현장 재반입하여 식재토록 설계되어 있었으나, 가이식장 수목 확인결과 수목으로서의 효용가치가 현저히 떨어지는 것으로 조사되었음.

❍ 이에 따라 유관기관(서초구청) 협의 결과에 의거 주변 식재와의 통일성을 고려한 신규  식재[느티나무(R18)]를 시행코자 함.

❍ 가로수 수목보호판은 구룡지하차도 수서방향 가로수 식재시 사용하였던 서울시 우수  공공디자인(2019년) 제품으로 변경 시공코자 하며, 그 적정성을 검토하고자 함.

▢ 추진경위

❍ ‘12.02~’14.04 : 현장 수목 가이식 시행 (성남시 수정구 심곡동 외)

❍ ‘15.07 : 과천시 가로수 제거 후 신규 식재 협의 (도기본 → 과천시)

☞ 결과 : 이견없음. (설계변경 완료, 식재시 수종 재협의 예정)

❍ ‘17.06 : 가이식 지장수목 중 가로수 수요처 조회 (도기본 → 서울시 각 구청)

☞ 결과 : 수요처 없음.

❍‘17.11 : 구룡지하차도 수서방향 가로수 식재 협의 (도기본 → 서초구청, 시설관리공단)

☞ 결과 : 가이식장 은행나무 수형불량 → 신규 느티나무 식재 협의 (식재 완료)

❍ ‘18.12 : “성남시 수정구 심곡동” 가이식장 토지소유주 토지임대 중지 요청

❍ ‘19.02 : 서초구청 공원녹지과 최종 식재 관련 회의 (도기본, 서초구청, 감리단, 시공사)

☞ 서초구청 의견 : 가이식장 수목 수형 및 수피 불량 등으로 향후 신규 식재 요청

❍ ‘19.04 : “성남시 수정구 심곡동” 토지소유주 민원 제기(1차)  (토지소유주 → 도기본)

❍ ‘19.05 : “성남시 수정구 심곡동” 가이식장 수목 수요처 조회 (도기본 → 서울시 각 구청)

☞ 서초구청 : 364주 중 61주(소나무 외) 반입 가능 통보 (이식 완료)

☞ 서초구청 외 : 수요처 없음.

❍ ‘19.07 : “성남시 수정구 심곡동” 토지소유주 민원 제기(2차) (토지소유주 → 도기본)

❍ ‘19.08 : “성남시 수정구 심곡동” 가이식장 이식수목 외 제거 검토 승인 (수목제거 완료)

❍ ‘20.03 : 염곡동서~구룡지하차도 구간 주변 식재 협의 (도기본 → 서초구청)

☞ 협의결과 : 가로수구간 신규 느티나무 식재, 일부 녹지구간 식재 보완 요청

❍ ‘20.05 : 염곡동서~구룡지하차도 구간 주변 식재 실정보고 승인 요청

▢ 금회가로수 식재 대상구간

▢ 검토내용

❍ 가로수 식재

공 종		당 초	변 경	비 고
교 목	가이식장 수목 식재	느티나무(R16~30) 53주 은행나무(B10~26) 147주
	신규 식재		느티나무(R18) 200주
교목 계		200주	200주

❍ 수목보호판

공 종		당 초	변 경	비 고
수목 보호판	일 반	113EA
	디자인 심의		113EA
수목보호판 계		113EA	113EA

❍ 가로수 수목보호판 현황사진

※ 수목보호판은 현재 서울시 우수공공디자인 인증기간이 만료되었으나, 주변 형식과의 통일성을 위해

구룡지하차도 수서방향 가로수 식재시 사용한 기존 제품을 적용함

❍ 적용단가 검토

- 증가수량 : 기 계약된 단가를 적용

❍ 공사비 증감 현황

구 분	금 액(천원)			비고
	당 초	변 경	증․감
1. 조 경 공
수목이식(가이식장 → 현장)	52,229		▽51,229
신규식재		145,457	145,457
수목보호판 변경	34,725	49,432	14,707
직접공사비 계	85,954	194,889	108,935
제 경 비(E/S포함)	29,501	27,838	▽1,663
공급가액	115,455	222,727	107,272
부가가치세	11,545	22,273	10,728
도 급 공 사 비	127,000	245,000	118,000

□ 검 토 결 과

◦ 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 염곡사거리 주변 가로수 식재와 관련하여 당초 가이식장 수목을 반입할 경우 수목의 효용가치가 현저히 떨어져 향후 민원 발생이 우려되는 바, 유관기관(서초구청) 협의에 의거 신규 식재[느티나무(R18), 주변 식재 통일성 고려]를 시행하는 것은 타당한 것으로 사료됨.

◦ 또한 가로수 수목보호판을 설치함에 있어 주변 가로수 식재시 사용하였던 서울시 우수공공디자인 제품(2019년)을 사용하고, 공사계약일반조건 제19조의6(4항)[소요자재의 수급방법 변경, 당초계약서의 사급자재를 관급자재로 변경할 수 없다.]에 의거 사급자재로 적용하는 것으로 타당한 것으로 사료됨.

Ⅲ		보고자 의견

▢ 강남순환 도시고속도로(8공구) 건설공사 관련 염곡사거리 주변 가로수 식재에 대한 실정보고 건으로

▢ 기존 가이식장 수목이 수형 불량등의 사유로 타장소 이식 및 제거되어, 현 공사구간내 활용할 수 없어서, 유관기관(서초구청)과 협의 후 느티나무로 신규 식재하는 내용임.

▢ 가로수 및 가로수 수목보호판 설치 처리방안에 대하여 건설사업관리기술자의 검토 의견이 타당하므로 승인 처리하고, 추후 설계 변경에 정산·반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임: 관련공문 1부. 끝.