문서번호	시설개선과-4209
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장
박희영	이영교	05/22 윤정한
협 조

구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사

시공사 실정보고 검토보고

2020.  5.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사

시공사 실정보고 검토보고

“구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사”업무 수행 중 실제시공에 따른 물량변경 사항에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

사업개요

○ 사 업 명 : 구의야구공원 주차장 주변 녹지대 정비공사

○ ************************

○ *****************************************

○ 기    간 : 2020. 4. 28. ~ 2020. 6. 26.

○ 공사내용

- 식  재 : 산딸나무 등 14종 12,088주, 맥문동 등 3종 2,500본

식생매트(줄사철 등 3종) 104㎡

- 시설물 : 데크로드 47m, 자연석쌓기 216.6m, 휴게쉼터 조성 등

추진경위

○ 2020.  4.  7.  계약심사 완료

○ 2020.  4. 16.  공사 발주

○ 2020.  4. 28.  공사 착공

○ 2020.  6. 26.  공사 준공(예정)

실정보고사항

○ 시공사 실정보고 공문 : KA2020 0522-01 (2020.5.22.)

○ 시공사 실정보고 내용 및 검토의견

구 분	현황 및 문제점	시공사 조치의견	검토의견
우배수 공 사	▶기존 배수로 및 집수정 활용에 따른 배수시설 수량변경 필요 -배수시설 수량변경 ****************** ▶배수로 스틸그레이팅 규격 불일치	▶배수시설 수량 변경에 따른 관급자재 물량감소 스틸그레이팅(뚜껑) : *************** 배수로관 : *************** -집 수 정 : *************** (관급업체 납품불가 : 기존배수로 활용) -스틸그레이팅(받침, 뚜껑) : **************** ▶배수로 스틸그레이팅 규격변경(관급자재) : 당초 300*995*32 ⇒ 변경 400*995*50	적정
시설물 공 사	▶데크로드 동선 간소화에 따른 지주고정용 기둥 수량 변경 요구됨 ▶자연석쌓기구간 지지기반(배수로) 확보로 기초콘크리트 삭제 및 현장 여건에 따른 물량증감 요구됨	▶지주고정용 기둥 물량변경(관급자재) - ****************** ▶사면안정성 확보 후 기초콘크리트 삭제 및 현장 여건에 맞게 물량변경 - 레미콘(관급자재) : ****************	적정
식재공사	▶자연석쌓기에 따른 절개면적 증가, 주차장 입구 경사지 토사유실로 인한 사면 식생보완 요구됨***** -************* -*************** ▶주차장 자연석쌓기 부분 회양목 이식 물량 누락	▶식생매트를 활용한 절개지 녹화 및 토사유실 방지 조치 -식생매트(관급자재) : ******************* ▶회양목 이식 : ***************	적정 ※ 주차장입구 경사지는 천호대로확장공사 완료시 도시기반시설본부에서 잔디 식재한 곳으로 현재 잔디고사 및 토사유실이 지속되고 있어 식재필요

************

*******	**			*****			***
	**	**	***	**	**	***
***********	*****	**	******	*********	*	**********	*****
**************************	***	**	****	*********	*	**********	*******
**************************	**	***	****	*	*******	********	*******
**********************	**	**	***	******	*****	*******	****
**************************	**	**	***	******	******	*******	****
******** *******************	**	**	***	*******	*	********	****
*********** **************	***	***	****	*********	*********	**********	*******
***************	***	***	*	*********	*******	*******	**** *********
****************************	****	***	****	*********	*********	**********	****
*******************	****	****	*****	*********	*********	**********	******
*******************	****	****	*****	*********	*********	**********	******
*******************	****	****	****	*********	*********	**********	******
**				**********	**********	*******
*****				*******	*******	****
**				**********	**********	*******

○ 예산조치: ************************

검토의견

○ 실정보고 내용 검토결과 타당하여 승인조치

○ 관급자재 변경을 먼저 시행하여 공정관리에 지장이 없도록 하고, 추후 설계변경 시에 이를 반영하고자 함.

붙임 1. 시공사 실정보고서 1부.

2. 관급자재 물량증감표 1부.  끝.