문서번호	방재시설부-7279
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
박용도	代김달용	05/22 박홍봉

『서울광역 푸드뱅크센터 이전 건립공사』

지장 수목 처리방안 검토 보고

2020. 5.

도시기반시설본부

방 재 시 설 부

『서울광역 푸드뱅크센터 이전 건립공사』

지장 수목 처리방안 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『서울광역 푸드뱅크센터 이전 건립공사』와 관련하여 지장수목 처리방안을 검토 보고 드림.

- 근거: 푸뱅 제2020-09호(2020.4.23.)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 서울광역 푸드뱅크센터 이전 건립공사

▢ 위    치 : 중랑물재생센터 내(성동구 송정동 74-7)

▢ 규    모 : 지상 2층, 부지면적 2,000㎡, 건축면적 757.36㎡, 연면적 985.36㎡

물류창고, 사무실, 교육장 등

▢ 공사기간 : 2019.12.16. ~ 2020.7.15.

▢ 사 업 비 : 1,212백만원

▢ 감리사/도급사 : ㈜중원종합건축사사무소/효상건설(주), ㈜신한에스엔지

Ⅱ		건설사업기술자 검토내용

▢ 검토목적

❍ 하도자 내역서 계약 당시 「따르릉 사업소」 이전 건립공사는 제외됐음

❍ 하도자 내역서 계약 물량과 현장 실물량과 차이성

❍ 하도자 계약 물량 변화에 따른 적성성 검토함

▢ 관련근거

❍ 효상2020-005(2020.4.17.)호

▢ 검토내용

❍ 변경 내용 – 계약내역(도면 등)과 현황과 불일치 내용 조정

공 종	규 격	단위	수 량		증 감	비고
			당초	변경
수고식재	H:2.6~3.0m	주	42	58	△6	-계약물량 (65주)이식 -4주 따르릉부지
스트로브잣나무	H:2.6~3.0m	주	10
조형나무	R20	주		2	△2	이식
느티나무	R30	주	2	2		이식
모과나무	R25	주	3	3		이식
모과나무	R20	주	3	3		이식
무궁화	H:2.1~2.5m	주	84	84		이식
수수꽃다리	H:2.6~3.0m	주		10	△10	신규발생 이식
벚나무	R20	주	2	2		이식
벚나무	R10	주	3	1	△2	신규발생 이식
살구나무	R25	주		1	△1	신규발생 이식
단풍나무	R12	주	2	2		이식
칠엽수	R25	주		1	△1	신규발생 이식
은행나무	B35	주	8	8		제거
은행나무	B30	주	2	2		제거
벚나무	B10	주	2	2		제거 2/3이상으로 수형불량및고사목
벚나무	B8	주	6	6
무궁화	B12	주	5	5		고사목
무궁화	B66	주	8	8
칠엽수	B6	주		1	△1	2/3이상고사목
단풍나무	B10	주	2	2		고사목
모과나무	B15	주	6	6		2/3이상으로고사목

❍ 예정공사금액(조경식재공사)

당초금액(원)	변경금액(원)	증 감(원)
3.600.000	13.650.000	10.050.000

□ 검 토 결 과

◦ 「서울광역 푸드뱅크센터 이전건립공사」와 관련하여 조경 식재공사중 이식 수목은 중량물센터 녹지과와 위치 확정하여 이식 하였고 현 관리중에 있음

◦ 「따르릉 사업소이전건립공사」이전 부지내 일부 나무는 생육상태가 불량하여 제거함이 올다고 판단되고 은행나무(10주)는 대형으로  이식후 위치 및 관리도 어렵고, 공사완료후 자전거 관리상 출입구에 간섭이되 현장 여건상 제거함이 바른 판단으로 봄

◦ 현장여건을 고려한 공사의 원활한 추진 및 적절한 품질 확보가 이루어 질것으로 사료됨

Ⅲ		보고자 의견

▢ 「서울광역 푸드뱅크센터 이전 건립공사」와 관련하여 조경 이식 공사 중 현황의 불일치 된 내용에 대하여 현황에 맞추어 실정보고 사항에 대하여 승인하고자 하며,

▢ 제거 대상 수목중 비교적 상태가 양호하여 수요처를 조사한 수목(은행나무 10주)에 대하여는 수요 요청이 없어 책임건설사업관리기술자 의견에 따라 처리(제거)하고자 함.

▢ 위 사항에 대한 금액 변경 내용을 보완하여 실정보고하도록 책임건설사업관리자에게 통보하고, 내용을 검토하고 추후 설계 변경에 정산·반영하도록 하고자 함.

붙임: 관련공문 1부. 끝.