투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경계약(1차4회)의뢰

1. 우리본부에서 시행중인 「용두3 및 신이문빗물펌프장 신,증설공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차4회)계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 용두3 및 신이문빗물펌프장 신,증설공사

나. 공사기간 : ‘13.1.3. ~ ’15.2.28(1차 :‘13.1.3 ~ ’15.2.28)

다. 도 급 비 : 3,526백만원(1차 889백만원)

라. 도 급 자 : 동도건설(주) 대표 황병구

마. 예산과목 : 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 용두3 및 신이문빗물펌프장

시설용량증대, 시설비

바. 설계변경내역

1) 1차 4회

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		1,510,000,000	1,685,000,000	증) 175,000,000
도급비	공급가액	808,209,191	967,000,000	증) 158,790,809
	부가가치세	80,820,919	96,700,000	증) 15,879,081
	소계	889,030,110	1,063,700,000	증) 174,669,890
관급자재비		365,876,620	365,876,620	-
폐기물처리비		25,000,000	25,000,000	-
이전비		230,093,270	230,423,380	증) 330,110

따로붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서(1차4회) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	서관석		방재시설과장	대결 07/14 서관석
협조자	주무관	오수양		계약1팀장	김점선
시행	방재시설부-6161	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개