다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)평화엔지니어링 대표 권재원 귀하
(경유)
제목	성산대교 성능개선사업 추가과업 승인 통보

1. 귀사와 계약체결하여 시행중인 『성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역』과 관련입니다.

2. 귀사에서 요청한 성산대교 성능개선사업 추가 과업사항에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 조속한 시일내에 추가과업을 시행하고 추가과업 결과를 설계용역에 반영 검토하시기 바라며, 추가과업에 소요되는 비용은 추후 설계변경시 정산 반영코자 합니다.

가. 추가과업 승인내역

ㅇ 용접부 비파괴시험 및 부식두께 측정

- 소요예산 : 93.5백만원

ㅇ 측량 추가과업 실시

- 소요예산 : 28.6백만원

나. 관련 전문가 자문회의 실시후 추진

ㅇ 용접부 변동응력 측정 및 잔존수명 검토분석.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김귀용		한강교량팀장	하현석		도로시설과장	07/14 이용심
협조자
시행	도로시설과-12405	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 2동1층	/
전화	02)2133-1673	/전송	02)2133-1078	/	gyong@seoul.go.kr	/	대시민공개