문서번호	공공재생과-5664
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공재생지원팀장	공공재생과장
이민찬		박정화	05/22 이동일
협조

서울역일대 도시재생 거점시설(빌라집) 운영물품 구매계약 변경 계획

2020. 5

도시재생실

공공재생과

서울역일대 도시재생 거점시설(빌라집) 운영물품 구매계약 변경 계획

서울역 일대 도시재생 거점시설(빌라집) 조성 지연에 따른 운영 물품의 납품 기한 연장 등 계약사항을 변경하고자 함

□ 목공방 운영물품 구매 계약기간 변경

□ 계약 개요

○ 계약건명 : 서울역 일대 도시재생 거점시설(빌라집) 마을 목공방 운영물품 구매

○ 계약금액 : 금23,510,000원(금이천삼백오십일만원)

○ 계약방법 : 수의계약

○ 계약업체 : ************

○ 계약기간 : ‘19.12.11 ~ ’20.4.10

○ 계약내용 : 프레스 등 8건

□ 변경 사항

○ 계약기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	‘19.12.11~’20.4.10	‘19.12.11~’20.10.31

□ 귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 서울특별시

- 도시재생 거점시설(빌라집) 준공 지연에 따른 운영물품 납품기간 연기 필요

○ 지체상금 : 미부과

□ 조달물품 납품기한 연장 및 구매수량 조정

□ 계약 개요

○ 계약건명 : 서울역 일대 도시재생 거점시설 조달구매

○ 계약금액 : 금4,981,750원(금사백구십팔만일천칠백오십원)

○ 계약방법 : 조달계약

○ 계약기간 : ‘20.1.10~’20.6.1일 이후

○ 물품내역

물 품 명	물품분류번호	단위	수 량	비 고
LCD패널또는모니터	43******* 22667800	대	5
문서세단기	44******* 22350413	대	1

□ 변경 사항

○ 납품기한 연장

구 분	당 초	변 경	비 고
기 간	‘20.1.10~‘20.6.1일이후	‘20.1.10~‘20.8.31

○ 모니터 구매수량 조정

물 품 명	단위	수 량		비 고
		당초	변경
LCD패널또는모니터	대	5	4	△1

□ 변경 사유

○ 납품기한 연장 : 빌라집 조성 시기에 맞춰 납품기한 변경

○ 모니터 구매 수량 조정 : 기 구매한 검벽돌집 복사기 규격 변경 및 추가 지출액 발생으로(공공재생과-1119.1.31.) 이월예산 집행잔액이 부족하여 모니터 5대를 4대로 조정하고 1대는 금년도 예산으로 구입 예정