투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약금액 및 계약기간 변경의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

우리본부에서 시행중인 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 관련, 계약금액 및 계약기간을 아래와 같이 변경의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

나. 계 약 자: ****************

다. 변경내용

구분	계약금액(천원)			계약기간		비고
	당초	변경	증감	당초	변경
총차	*********	*********	********	′17.11.20 ~′20.6.30	′17.11.20 ~′20.10.31	1,2차 준공
3차	*********	*********	********	′20.1.16 ~′20.6.30	′20.1.16 ~′20.10.31	금차

라. 변경사유: 물가변동 조정 및 운영기관 요청사항 설계변경에 따른 계약금액 변경

선행공종 공기연장에 따른 기계설비공사 공사기간 연장

마. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임: 1) 계약금액 및 공기연장 검토보고서 1부

2) 합의각서(총차, 3차) 각1부

3) 변경설계 내역서(총차, 3차) 각1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	05/22 임정규
협조자
시행	설비부-7353	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8605	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	부분공개(5)