투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립용역)

1. 우리과에서 시행중인 「한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립용역」에 대하여  아래와     같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 합니다.

가. 용 역 명 : 한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립용역

나. 계약금액 : 189,048,700원

다. 계 약 자 : ㈜동서엔지니어링 대표 이익상

라. 계약기간 : 2020. 3. 11. ~ 2020. 12. 31.

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	189,048,700	210,414,600	증) 21,365,900
용역기간	2020.3.13 ~ 2020.12.31	변경없음

바. 설계변경 사유 : 저수호안조사 반영(L=83km)

사. 예산과목

○ 한강공원관리 및 운영, 한강하천시설 관리, 한강저수로정비, 시설비 (401-01, 시비)

○ 깨끗한 물관리, 한강 수질개선, 잠실상수원 퇴적물준설, 시설비(401-01, 기금)

붙임 : 1) 설계변경 방침서. 1부.

2) 변경설계내역서 1부.

3) 낙찰차액(잔여예산) 사용계획 보고. 1부.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	05/22 손창열
협조자
시행	치수과-2160	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개