투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청 (쉴드TBM 경제성 확보 용역)

우리부에서 시행 중인 「쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안 용역」의 준공기한을 아래와 같이 변경요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안 용역

나. 계 약 자 : (사)한국터널지하공한학회 이석원

다. 계약금액 : 금234,651,000원

라. 용역기간 : 2018.06.01. ~ 2020.05.31.

마. 변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	234,651,000원	234,651,000원	변경없음
용역기간	‘18.06.01~‘20.05.31	‘18.06.01~‘20.06.30	30일 연장

바. 변경사유 : 강도 높은 사회적 거리두기 시행에 따른 용역기간 연장

사. 예산과목 : 도시철도, 도시철도건설사업, 쉴드TBM 기술발전 방안 마련. 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1) 용역 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기요청서 및 합의각서 각 1부.  끝.

	도시철도계획부장
주무관	이경훈		계획과장	김동철		도시철도계획부장	05/22 김용학
협조자
시행	도시철도계획부-4446	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 10층(도시철도계획부)	/
전화	02-772-7133	/전송	02-772-7304	/	lkh00n@seoul.go.kr	/	대시민공개