함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의 고도정수처리시설공사 건설사업관리자
(경유)
제목	업무지시 (조명기구 LED광원변경 승인통보)

1. 구의보수과-846호(’13.4.1) 및 구의CM 제2014-353호(’14.7.3)와 관련입니다.

2. 서울광원 LED조명 보급활성화 계획에 따라 고도정수처리시설공사 조명기구에대해 LED등기구 교체를 위한 검토보고에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시공 및 품질관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

□ 승 인 사 항

가. 규격 및 물량변경

구분	위 치	규격변경	수 량
			당초	변경
1	관리본관 1~3층 (379)	직관형 LED → 평판평 LED	379	379
2	관리본관 2층(15) 약품투입동(109) 응집침전지(142) 여과지동(166) 활성탄/오존접촉지(436) 공동구 및 브릿지(74) 수위실(47) 옥외보안등(57) 관리본관 지하(97)	일반용 형광등, 메탈등 → LED 등기구	1,168	1,143
계			1,547	1,522

나. 관리본관 이전에 지장없도록 등 설치공사 공정관리 철저

다. ’14년 서울시 공공기관 LED조명보급 기준에 적합한 제품 선정

라. 광원변경에 따른 금액변경(증 157,333천원)은 본부 계약심사금액으로 확정.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	함진각		기전설비과장	서대훈		생산부장	07/14 박용철
협조자
시행	기전설비과-4720	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동27-1)	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	jgham63@seoul.go.kr	/	대시민공개