함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대형수도계량기 교체공사 변경계약(최종) 시행

1. 수도자재관리센터-12956(2014.7.10.)호와 관련입니다.

2. 대형수도계량기 교체공사 기변경계약에서 추가변경된 내용이 있어 아래와 같이  최종 준공 위한 변경계약을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 대형수도계량기 교체공사 (장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : 홍용종합건설(주) 대표 이춘택, 한서건설(주) 대표 김진해

다. 계약기간 : 2012.07.01 ~ 2014.07.15

라. 계약금액

- 총계약금액 : 금866,232,000원(금팔억육천육백이십삼만이천원)

- 당  초 : 금784,000,970원 (금칠억팔천사백만구백칠십원)

- 변  경 : 금787,349,230원 (금칠억팔천칠백삼십사만구천이백삼십원)

[감  액 : 금78,882,770원 (금칠천팔백팔십팔만이천칠백칠십원)]

마. 변경사유 : 최종 준공물량 증감에 따른 계약물량 조정

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 민간위탁대행사업비

붙 임 : 1. 준공정산보고  1부

2. 변경설계내역서 1부.

3. 제비율검증서 1부.

4. 변경합의서 및 보험료 납부자료 각1부.

주무관	조중엽		계량기관리팀장	代김흥식		소장	07/15 성시영
협조자	주무관	한상미		행정관리팀장	최우섭
시행	수도자재관리센터-13305	(		)	접수		(		)
우	156-812	서울특별시 동작구 노들로 734	/
전화	02-3146-1941	/전송	02-3146-1909	/	aav223@seoul.go.kr	/	대시민공개