투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 책임감리원
(경유)
제목	실정보고(차수벽 위치변경) 회신

1.문서번호 : SMIH-14-32108

2.작성일자 : 2014-07-15 09:07:35

3.제    목 : 실정보고(차수벽 위치변경) 회신

4.내    용 :“서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업”의 차수벽 시공과 관련 이차침전지 후단의 차수벽 시공위치를 방류BOX 기준 남측방향에서 북측방향으로 위치변경하는 실정보고에 대하여는 현재 총인처리시설 기본 및 실시설계가 진행중이고, 그외 소화조구간 가시설 공법변경 등 전반적인 변경이 필요하므로 우선 감리단에서 선시공 승인하고 최종 변경시 종합적으로 변경하시기 바랍니다. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							김상용			환경시설과장					박희천					방재시설과장					대결 07/15 서관석
협조자
시행			방재시설부-6188									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층															/
전화		02)3708-8782						/전송			02)3708-8756					/	kimsy2405@seoul.go.kr												/	대시민공개