문서번호	시설보수과-2887
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
금종융		김찬구	07/15 민승기
협조

'14년 도로시설물 세척용역 작업계획(2차)

2014. 7.

남부도로사업소

(시설보수과)

2014년 도로시설물 세척용역 작업계획(2차)

우리사업소 관내 도로시설물 세척과 관련하여 용역계약 체결한 「2014년 도로시설물 세척용역」제2차 작업계획 보고임

용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 도로시설물 세척용역

○ 용역기간 : 2014.4.2 ~ 2015.2.28

○ 도 급 액 : 130,706,700원

○ 용역개요 : 터널 5개소, 교량 및 고가 2개소, 지하차도 6개소

○ 도 급 자 : (주)미동기술  이 상 복

보고내용

○ 도로시설물 청결개선대책과 관련하여 우리사업소 관내 도로시설물 세척시행을 위한 도급 용역업체에 2차 작업지시를 하고자 함.

○ 금회 작업지시대상 시설물 : 호암1터널 등 12개소

연번	시설물명	작업일자	작업내용	비고
1	호암1·호암2터널	7.21일(월)	벽체타일,바닥,난간 방음판	야간
2	난곡·산복터널, 금천교	7.22일(화)	벽체타일,바닥,난간 방음판,방호울타리	야간
3	사평지하차도, 이수고가	7.23일(수)	벽체타일,방음벽, 방호울타리	야간
4	염곡,잠수교남단지하차도,국사봉터널	7.24일(목)	벽체타일,벽체콘크리트	주,야간
5	신길·영등포,대방지하차도	8.11일(월)	벽체타일,벽체콘크리트, 바닥,방음벽	야간

※ 1) 우천시 일정이 변경될 수 있음

2) 대방지하차도 표면보수 작업으로 인해 8.11일로 연기

○ 투입장비

장 비 명	규 격	수량	용 도	비고
동력분무기	5 마력 3 마력	2	1차 벽체세정
고압세정기	250 BAR	3	2차 벽체세정
살 수 차	20 ton	2	용수 공급
화물차량	1톤 차량	3	고압세정기,동력분무기 용수운반
조립식비계틀	1,700× 900× 1,200	1	벽체상단부분 작업
싸인카	1톤 차량	2	교통방향지시
발전기	220V*1	1	전기막대풍선용
작업안전장구	식	1	로봇신호수

○ 투입인력

내 용	소요인원(인)	비고
방음판 세척	6
벽면(타일) 세척	6
벽면콘크리트 세척	3
바닥(보도),난간 세척	3
교량난간 및 차량방호책	6
교통통제요원	2

○ 교통안전시설물 투입계획

품 명	규 격	단위	수량	비 고
공사예고표지판(500m)	900× 1800	개	2	운전자용
공사예고표지판(300m)	900× 1800	개	2	운전자용

품 명	규 격	단위	수량	비 고
우회안내표지판(200m)	900× 1800	개	2	운전자용 (차로변경)
공사안내표지판(100m)	900× 1800	개	2	운전자용
공사안내표지판(0m)	900× 1800	개	2	보행자용
경 광 등	점멸등	개	50
라 바 콘	대 형	개	100
전기막대풍선	1,000×3,000	개	1
싸인보드카	차량장착	개	2

행정사항

○ 관련기관(관할경찰서 및 언론담당관, 교통방송) 협조요청 별도시행.

첨부   2차작업계획서 1부.   끝.