문서번호	토목부-13600
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	07/15 노우성

노출비탈면 강관네일링 수량변경(축소) 실정보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

노출비탈면 강관네일링 수량변경(축소) 실정보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

생태통로 설치 일부구간 비탈면 하단 중앙 일부에서 암반이 노출되어 안정성 검토결과 비탈면 안정공(가압식 강관네일링, 수평배수공)을 삭제하여도 안정한 것으로 검토되어 수량변경에 대한 실정보고임.

□ 관련근거

○ 강관네일링 수량변경(축소) 실정보고 제출(선사고덕0420-425호,‘14.7.10)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1.06. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액:35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

□ 검 토

○ 노출비탈면 구간(STA.1+440∼1+600) 흙깍기결과 비탈면하단 중앙부 일부 암반이 노출되어 사면안정성 검토결과 비탈면안정공(가압식 강관네일링, 수평배수공)을 삭제하여도 안정한 것으로 검토되어 수량 변경(축소) 필요

구 분	당 초	변 경	비고
비탈면안정공	․가압식 강관네일(312공) ․수평배수공(64공)	삭 제

○ 주요수량 증·감

구 분	단위	당 초			변 경			증감	비고
		1구간	2∼4구간	소계	1구간	2∼4구간	소계
강관Nail(L=12m)	공	16	161	177	-	161	161	(-) 16
〃 (L=14m)	공	118	44	162	-	44	44	(-) 118
〃 (L=16m)	공	178	74	252	-	74	74	(-) 178
소 계	공	312	279	591	-	279	279	(-) 312
수평배수공 (L=14m)	공	64	67	131	-	67	67	(-) 64

※ 1구간 : STA.1+460∼1+580(삭제구간)

2구간 : STA.2+060∼2+100,  2+280∼2+340

3구간 : STA.2+780∼2+820

4구간 : STA.3+220∼3+300

○ 공사비 증·감

(단위 : 원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비고
강관NAILING		557,507,116	248,321,990	-309,185,126
수평배수공		84,188,092	34,551,215	-49,636,877
자재,운반 등		50,039,159	46,342,764	-3,696,395
순공사비	식	691,734,367	329,215,969	-362,518,398
제 잡 비	식	157,265,633	76,784,031	-80,481,602
소 계		849,000,000	406,000,000	-443,000,000
부 가 세	식	84,900,000	40,600,000	-44,300,000
도급공사비		933,900,000	446,600,000	-487,300,000

□ 감리단 검토의견

○ 주요변경 내용은 STA.1+440∼1+600(L=360M)구간의 가압식 강관네일(L=12∼16m) 312공, 수평배수공(L=14m) 64공 삭제가 필요한 사항임.

○ 실정보고 검토결과 공사계약 일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경  1.설계변경 “가‘’항목중 2)지질,용수등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 4)발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우를 근거로 하여 추후 설계변경 함이 적정하다고 사료됨.

□ 조치계획

○ 감리단 의견과 같이 사면안정성 검토결과 비탈면안정공(가압식 강관네일링, 수평배수공)을 삭제하여도 안정한 것으로 검토되었으므로 수량 변경(축소)에 대하여 승인하고자 함.

붙 임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 시공사 실정보고 1부.  끝.