문서번호	도로보수과-3239
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	07/15 국중진

작업완료(완료구간) 보고서(제3,4,5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료(완료구간)보고(제3,4,5차)

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 48a, 절삭후덧씌우기 : 332a

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 착  공  일 : 2014. 3. 28

○ 준공예정일 : 2015. 2. 28

○ 도  급  자 : 한림토건  이현숙

○ 도 급 비 : 595,004,190원

□ 보고현황

【3차】

○ 3차 작업지시

- 작업지시일 : 2014. 5. 15(작업기간 : 2014.5.15.~7.31)

- 작업지시내용 : 장안동 480-19 ~ 481-19 앞외 5개소

(굴착복구A-1 : 2.71a, 차로단위복구 : 7.14a)

○ 작업완료구간 내용(3차)

- 작업완료일 : 2014. 7. 14

- 작업완료내용(5개소) : 장안동 480-19 ~ 481-19 앞외 4개소

(굴착복구A-1 : 4.44a, 차로단위복구 : 5.49a)

- 진행중(1개소) : 청량리동 205-726 ~ 205-552

(차로단위복구 : 2.04a)

연번	위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
3-1	장안동 480-19 ~ 481-19	A-1	1.2	4.0	4.8	1.3~ 5.8	9.1	14.24
3-2	답십리동 245-1 ~ 53-6	A-1	1.2	30.0	36.0	1.3	24.0	31.2
		평삭(A-1)	3.0	30.0	90.0	3.2	22.0	70.4
3-3	홍익동 590	A-1	1.2	85.0	102.0	1.2	92.0	110.4
		평삭(A-1)	3.5	85.0	297.5	3.1~4.0	96.0	357.0
3-4	응봉동 10-115	A-1	1.2	35.0	42.0	1.3	35.0	45.5
		평삭(A-1)	3.5	35.0	122.5	3.3	37.0	122.1
3-5	청량리동 205-726 ~ 205-552	A-1	1.2	65.0	78.0	0.5~4.3	163.5	235.72	진행중
		A-1	1.2	3.0	3.6
		평삭(A-1)	3.0	68.0	204.0
3-6	광나루로 369 (군자동) 앞	A-1	1.2	4.0	4.8	2.2	3.5	7.7
계					271.2 (714)			444.76 (549.5)

○ 작업현황

【4차】

○ 4차 작업지시

- 작업지시일 : 2014. 5. 21(작업기간 : 2014.5.21.~10.31)

- 작업지시내용 : 장안동 301-2~316-1 앞외 5개소

(굴착복구A-1 : 50.25a, 차로단위복구 : 124.5a)

○ 작업완료구간 내용(4차)

- 작업완료일 : 2014. 7. 14

- 작업완료내용(2개소) : 답십리동 53-6~21-79외 1개소

(굴착복구A-1 : 17.24a, 차로단위복구 : 35.4a)

- 진행중(4개소) : 장안동 301-2~316-1 앞외 3개소

(굴착복구A-1 : 41.15a, 차로단위복구 : 94.56a)

○ 작업현황

지시 번호	위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
4-1	장안동 301-2 ~ 316-1	A-1	1.2	420.0	504.0				진행중
		평삭(A-1)	3.0	420.0	1,260.0
4-2	답십리동 53-6 ~ 21-79	A-1	1.2	540.0	648.0	1.0~6.0	743.5	1,058.77
		평삭(A-1)	3.0	540.0	1,620.0	3.5~10.0	538.0	2,274.25
4-3	용두동 791 앞	A-1	1.2	240.0	288.0	1.2~4.2	380.3	665.59
		평삭(A-1)	3.0	240.0	720.0	2.3~8.0	311.2	1,265.65
4-4	군자동 463-10 ~ 화양동 21-6	A-1	1.25	1,450.0	1,812.5				진행중
		평삭(A-1)	3.0	1,450.0	4,350.0
4-5	광나루로 398 ~ 천호대로 546	A-1	1.2	1,282.0	1,538.4				진행중
		평삭(A-1)	3.0	1,282.0	3,846.0
4-6	능동로 107 ~ 능동로 129	A-1	1.2	218.0	261.6				진행중
		평삭(A-1)	3.0	218.0	654.0
게					5,025.5 (12,450)			1,724.36 (3,539.9)

【5차】

○ 5차 작업지시

- 작업지시일 : 2014. 6. 13(작업기간 : 2014.5.6.13.~9.30)

- 작업지시내용 : 마장동 498-2 앞외 4개소

(굴착복구A-1 : 11.67a, 차로단위복구 : 21.5a)

○ 작업완료구간 내용(5차)

- 작업완료일 : 2014. 7. 14

- 작업완료내용(4개소) : 마장동 498-2 앞외 3개소

(굴착복구A-1 : 5.95a, 차로단위복구 : 11.69a)

- 진행중(1개소) : 군자동 동일로206 ~ 광나루로337

(굴착복구A-1 : 7.5a, 차로단위복구 : 10.0a)

지시 번호	위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
5-1	마장동 498-2~ 773-1	A-1	1.2	315.0	378.0	1.2~9.0	379.9	561.47
		평삭(A-1)	3.5	315.0	1,102.5	2.9~7.0	327.0	1,169.3
5-2	행당동 40-15	A-1	1.2	9.0	10.8	1.2~2.3	22.0	33.44
5-3	군자동 동일로206 ~ 광나루로337	A-1	3.0	250.0	750.0				진행중
		평삭(A-1)	4.0	250.0	1,000
5-4-1	마장동 827	A-1	1.2	2.0	2.4			5-1에 포함
		평삭(A-1)	2.0	2.0	4.0
5-4-2	마장동 827	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-3	마장동 817	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-4	마장동 817	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-5	마장동 773-2	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-6	마장동 773-2	A-1	1.2	4.0	4.8
		평삭(A-1)	2.0	4.0	8.0
5-4-7	마장동 773-7	A-1	1.2	2.0	2.4
		평삭(A-1)	2.0	2.0	4.0
					1.167.6 (2,150.5)			594.9 (1,169.3)

○ 작업현황

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 진행중인 공사(6개소)를 제외한 복구 완료된 구간에 대        하여 추후 설계변경에 반영하여 준공처리 하고자 하며,

진행중인 공사에 대하여는 복구완료후 완료보고 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료(부분)보고서 3부(별도). 끝.