문서번호	정수시설과-1622
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김종수		07/15 윤종민
협 조
	주무관			곽희영
	주무관			최양교
	주무관			김진수

설계변경 심의위원회 개최

(뚝도아리수정수센터 배출수처리장 회수관로개량공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최

우리 정수센터에서 시행하는 뚝도아리수정수센터 배출수처리장 회수관로 개량공사에 대한 심의 위원회를 개최하여 설계변경 시행코자 함

가. 설계변경 현황

○ 공 사 명 : 『뚝도아리수정수센터 배출수처리장 회수관로개량공사』

○ 공사개요 : 당초- D=800㎜, L= 84m

변경- D=800㎜, L= 78m(감 6m)

○ 도 급 비 : 당초- 30,598,575원

변경- 30,525,000원(감 73,575원)

○ 공사기간 : 2014. 4. 17 ∼ 2014. 7. 17

○ 시 공 사 : (주)도화건설  대표 김선영

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

나. 심의위원회 개최

❍ 심의위원장 : 정수시설과장

❍ 심의위원 : 정수시설과 전기 6 곽희영, 기계6 최양교, 정수과 시설 7 김진수

❍ 개최일시 및 장소

- 일시 : 2014. 7. 16(수) 10:00

- 장소 : 정수시설과

다. 심의내용

❍ 시공물량 증감 및 신규물량 발생에 따른 설계변경 적정성 심의

- 물량변동 적정성 여부

- 계약변동(증ㆍ감) 물량 및 신규 계약단가 적용 적정성 여부

- 제경비 적정 산정 및 적용의 적정성 여부 등

설계변경 심의 위원회

일  시 :  2014. 7. 16(수) 10:00

장  소 :  정수시설과

안  건 : 뚝도아리수정수센터 배출수처리장 회수관로개량공사

설계변경 심의

설계변경 사유 : 시공 물량 증ㆍ감 및 신규물량 발생에 따른 변경

심의결과

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	정수시설과장		윤 종 민 (인)
위 원	정수시설과 전기6급		곽 희 영 (인)
위 원	정수시설과 기계6급		최 양 교 (인)
위 원	정수과 시설7급		김 진 수 (인)

붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부. 끝