문서번호	택시물류과-19203
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	택시면허팀장	택시물류과장
김세교	공성국	07/15 김규룡

준공기한 연기보고

(제3차 서울특별시 택시 총량 산정 용역)

2014.7

택시물류과

준공기한 연기보고

(제3차 서울특별시 택시 총량 산정 용역)

「제3차 서울특별시 택시 총량 산정 용역」과업 진행시 개인택시 디지털 운행기록계 정보수집 기한이 장기간 추가 소요된 점과 총량제 심의위원회 개최지연에 따른 감차계획 수립 기한이 필요한 점을 감안하여 준공 기한을 연장하고자 함
	ㅊ

용역 개요

용 역 명 : 제3차 서울특별시 택시 총량 산정 용역

내    용 : 서울특별시 택시 적정 공급 대수 산정 및 감차계획 수립

기    간 : 2014.2.24.~2014.7.22(5개월)

용 역 비 : 48,500,000원

용 역 사 : (재)서울연구원

추진 경위

‘14.2.24 : 용역 착수

‘14.4.~5: 택시 운행정보 수집

‘14.6    : 택시운행정보 분석 및 총량산정

‘14.7. 2 : 총량산정 결과 중간보고

‘14.7.15 : 총량제 심의위원회 개최

준공기한 연기사유

본 용역의 과업 추진에 필수적인 개인택시 운행정보 수집에 당초계획과 달리 많은 기한이 추가로 소요되었고, 이에 따라 총량제 심의위원회의 총량결정이 지연됨에 따라 감차계획 수립을 위한 연구용역 기한이 추가적으로 소요되어 용역기한 연장 필요

조치 계획

준공기한 연기 요청(재무과) :  (당초)‘14.7.22 → (변경)’14.8.22

지체상금 미부과

- 귀책 사유 : 서울특별시

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.