문서번호	보행자전거과-7892
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보행안전팀장	보행자전거과장
박홍		이경우	07/15 이원목
협조

스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 대상지 변경

2014.7.

도시교통본부

(보행자전거과)

스쿨존과 연계한

이면도로 안전개선사업 대상지 변경 보고

안전행정부 특교세「스쿨존 연계 이면도로 안전개선」사업으로 선정된 중랑구 봉우재로6길(중랑초교)이 주변상가 민원 등으로 사업취소 요청이 있어 강동구 고덕로 38길(명일초교)로 변경하여 시행코자 함

□ 관련근거

○ 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 대상지 확정 및 추진지침 통보

- 안행부 안전개선과-1762(’14.6.16)

○ 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 취소요청(중랑구)

- 중랑구 교통지도과-10426(’14.7.1)

□ 사업개요

○ 대  상 : 강동구 고덕로38길(명일초교 연계도로)

○ 규  모 : 연장 230m, 폭 10m

○ 사업비 : 300백만원(국비150, 지방비150)

○ 내  용 : 보행자 우선 노면표시 개선 등 교통안전시설 개선

시케인, 고원식교차로 등 운전자 서행유도 시설설치

□ 보고내용

○ 어린이 통학로의 안전과 쾌적한 보행환경을 조성코자 중랑구 봉우재로 6길(중랑초교)을 안행부에서 추진하는『스쿨존 연계 이면도로 안전개선』사업지로 신청·최종 선정되어 자치구에 예산 배정코자 하였으나,

○ 관할구청에서 본 사업지는 동부시장과 연계되는 상가 밀집지역으로 기존 상가주인 들의 민원 및 사업이후 주차난 해소를 위한 시간제 주차허용 등에 문제가 있다는 이유로 사업취소 요청이 있어

○ 안행부의 스쿨존연계 안전개선사업 취지와 부합하고 주민자치위원, 학부모회, 녹색어머니회 등 주민협의체를 구성하여 보행환경 개선요구와  사업추진 의지가 높은 강동구 고덕로38길(명일초교 통학로)를 사업대상지로 변경 추진 하고자 하는 사항임.

□ 조치의견

○『스쿨존연계 이면도로 안전개선』사업대상을 안행부에 변경(봉우재로 6길→고덕로38길) 승인 요청 하고자 함.

붙임 : 사업대상지 위치도 및 전경(강동구 명일초교 연계도로) 1부.  끝.

붙  임

스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 전경

○ 사업명 : 명일초교 이면도로 정비사업

○ 위  치 : 서울시 강동구 고덕로38길 명일초교 이면도로

○ 사업량 : 연장 230m(도막형포장, 도로포장, 고원식교차로, 과속방지턱)

(개선사항 및 연계효과)

ㅇ 개선사항 : 도막형포장, 도로포장, 고원식교차로, 과속방지턱 설치 등

ㅇ 연계효과 : 명일초교 어린이보호구역과 연계하여 어린가 안전한 통학로 조성

보차 미분리 구간 보행환경 개선 및 운전자 안전운전 유도