문서번호	안전지원과-15510
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	체험관장	안전교육팀장		안전지원과장
김영수	박정경	정진항		07/15 진준호
협 조
	경리팀장		박찬호

- 광나루안전체험관 업그레이드 연구용역 -

계약기간 연장 계획

2014. 7

서울소방재난본부

안전지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 광나루안전체험관 업그레이드 연구용역 -

계 약 기 간 연 장 계 획

『광나루안전체험관 업그레이드 연구』용역과 관련하여 최신 급변한 체험안전교육 패러다임 및 쟁점사항을 반영하기 위한 시간적 필요에 따라 계약기간 연장신청을 승인 하고자 함

Ⅰ				관련근거

□ 안전지원과-14812(2014.07.04.)호“심의회 개최 결과”

□ 도시방재안전연구소-105(2014. 6. 30)호「광나루안전체험관 업그레이드 연구용역」기간연장 신청

□ 소방행정과-10339(2014.4.22.)호 “계약체결통보”

□ 시장요청사항(‘13.12.2) “노후된 소방안전체험관의 시설 및 컨텐츠 업그레이드 필요”

□ 시의회 도시안전위원회 현장방문시 『연차별 업그레이드 방안 강구』검토요청(‘13.3.5)

Ⅱ				연구개요

□ 연 구 명 : 광나루안전체험관 업그레이드 연구

□ 계약내용

○ 계약업체 : 서울시립대학교 산학협력단(대표 황은성)

○ 연 구 원 : 윤명오 교수 외 5명

○ 계약기간 : 2014. 4. 22 ~ 7. 20(계약일로부터 90일)

○ 계약금액 : 42,680천원         ※확보예산 44,000천원

○ 주요 과업내용

- 국내․외 체험시설 자료수집

- 체험관 내․외부 공간 활용 계획

- 신규 체험시설, 콘텐츠, 프로그램 개발 연구

- 중․장기 계획 실현을 위한 우선과제 도출 및 실천계획 작성

- 중․기 계획추진을 위한 소요 예산 산정

Ⅲ				추진경위

계약체결	⇨	착수보고회	⇨	자문회의	⇨	계약기간 연장요청	⇨	계약연장관련 심의위원회 개최
2014. 04.22		2014.04.29		2014. 06.17		2014. 06.30		2014. 07.03

Ⅳ				계약기간 연장개요

□  연장요청 기관 : 서울시립대학교 산학협력단(도시방재안전연구소)    □  연장요청 기간 : 2014.07.21. ~ 2014. 08. 15[4주(26일)]

※ 당초계약기간 : 2014. 04.22 ~2014.07.20.(90일)

□  연장요청 사유 : 추가조사 및 검증을 위한 시간필요

○ 최신 급변한 안전체험교육 패러다임 및 변경사항 반영

○ 방대한 안전교육 매뉴얼의 내실화 및 최적의 연구산출물 도출

○ 최근 동향 반영을 위한 하이 퀄리티 신규 컨텐츠 개발

※ 계약금액의 조정(추가)없이 용역기간 연장

Ⅴ				검토사항

□  관련규정 검토

○ 계약상대자는 용역수행이 지체되었을 시 계약담당자에게

계약기간 연장을 신청할 수 있으며

○ 계약담당자는 연장신청 접수시 사실조사(심의위원회 개최) 후         용역이 적절히 수행 될 수 있도록 연장 등 필요한 조치를 하여야 함

○ 지연배상금 : 계약담당자는 “가”에 정한 에는        그 연장기간에 대하여는 “1”에 따른 지연배상금을 부과해서는 아니 된다.

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부 예규 47호)

○ 서울시 학술심의회 재심의 : 요청대상아님

- 용역비 및 용역기간 30%이상 증가된 경우 재심의 요청

[용역기간 90일, 연장기간 25일(28.8%)]

※ 조직담당관-9562(2012. 8.7)호『2012년 학술용역 추진지침』

Ⅵ				향후계획

□  기간연장 요청 협조(소방행정과)

□  연구용역 기간 변경 요청에 대한 승인 통보(서울시립대학교)

□  중간보고회 실시 : 7월 말

□  2차 자문위원회 개최 : 8월 초

□  최종 성과물 납품 및 연구용역 완료(8.15(토))

□  최종보고회 : 8월 18일(월)예정

Ⅶ				행정사항

□  기간 연장에 따른 연장일수는 지연 배상금 산정일수에서 제외(경리팀장)

□ 추진부서에서는 연장기간동안 연구 성과물이 나올 수 있도록         관리 및 감독 철저

붙임 : 1. 연구용역 기간 연장 요청 공문 1부.

2. 심의위원외 개최 결과 보고 공문(회의록) 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 세부과업별 추가일정표 및 자문회의록 1부.  끝.