다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(제3차 서울특별시 택시 총량 산정 용역)

1. 우리 부서에서 추진하고 있는 “제3차 서울특별시 택시 총량 산정 용역”추진과 관련하여 용역의 원활한 추진을 위하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 준공기한 연기 내용

- 당초 용역기한 : 2014.2.24.~7.22(5개월)

- 변경 용역기한 : 2014.2.24.~8.22(6개월)

- 용역금액 : 변동없음

붙임 : 1. 준공기한 연기 방침서(준공기한 연기 의뢰서 포함). 끝.

2. 합의각서 1부. 끝.

	택시물류과장
주무관	김세교		택시면허팀장	공성국		택시물류과장	07/16 김규룡
협조자
시행	택시물류과-19309	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 7층 택시물류과	/
전화	2133-2323	/전송	2133-1050	/	wwind10@seoul.go.kr	/	대시민공개