문서번호	방재시설부-6269
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장
한종수		대결 07/16 서관석
협조
	주무관		이병환

「용허리공원 빗물저류조 설치공사」

보조감리원(토목분야) 근무기간 연장 검토 보고

2014. 7

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

『용허리공원 빗물저류조 설치공사 』

보조감리원(토목분야) 근무기간 연장 검토 보고

‘용허리공원 빗물저류조 설치공사’ 시행 중 준공도서 작성 및 시설물 인계를 위한 감리원의 지속적인 투입이 필요한 실정으로 보조감리원(토목분야) 근무기간 연장에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

❍ 잠원2감 2014-193호(2014.7.10) : 전면책임감리용역 업무수행 계획 보고

2		공사개요

❍ 공 사 명 :『용허리공원 빗물저류조 설치공사』

❍ 공사규모 : 빗물저류조 V=15,000㎥, 유입관로 L=237m

❍ 공사기간 : 2012. 12. 20 ~ 2014. 9. 30

❍ 총사업비 : 금11,000백만원

❍ 시공사/감리사 : 케이월드종합건설(주) / (주) 신명건설기술공사

3		현안 문제 검토

❍ 공사 추진 현황

- 저류조(V=15,000㎥) 및 유입관로(L=237m) 등 토목공사 완료(공정율 98%)

- 2014. 7월 현재 저류조 상부 조경공사 중

❍ 토목감리 추가 투입 요인 발생

- 준공 서류 작성 등 토목감리 추가 수요 요인 발생

․ 도급비 및 공사기간 증가로 감리 추가 요인 발생

┌ 도급비 : 5,590백만원 → 7,625백만원 증 2,035백만원, 계약대비 36%증가

└ 공사기간 : 2013.12.18. → 2014. 9. 30 증 284일, 계약대비 77%증가

․ 설계변경 및 준공서류 작성 등 토목감리 소요 예상 됨

4		감리단 의견

❍ 2014년 수방대비를 위해 열악한 환경에서 공사가 진행되어 왔고

❍ 시설물 인계 및 준공서류 작성을 위한 토목 보조감리원 연장 투입이  필요한 실정이며,

❍ 토목감리원 추가 추입에 따른 용역비는 추후 “잠원2 빗물펌프장 신설공사 전면책임감리용역” 설계변경시 반영 코자 함.

- 감리기간 : 당초 ′13.4.1~′14.7.31 → 변경 ′13.4.1~′14.9.30(증61일)

- 소요예산 : 19,563천원

5		조치계획

❍ 책임감리원의 의견과 같이 시설물 인계 및 준공도서 작성을 위한 보조 감리원이 필요하므로 토목감리원의 투입을 61일간 연장하여 투입하고 추후 “잠원2 빗물펌프장 신설공사 전면책임감리용역” 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.   끝