문서번호	정수과-1588
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조현태		임건혁	07/16 박기석
협조	정수시설과장		안길찬
	원수관리과장		손주옥

고도처리 시운전 관계자

회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

고도처리 시운전 관계자 회의결과 보고

1		회의개요

일 시 : 2014. 7.15. 16:00 ~ 17:00

장 소 : 본관 1층 소회의실

참석 인원 (9명)

○ 본 부 :  명

○ 강 북 : 정수과장외 5명

○ 현 장 : 강북고도 책임사업관리자, 대보건설 , 시운전팀(3명)

2		작업내용

전주(7/8 ~ 7/15)작업사항

1. 활성탄 흡착지 세척(2계열)

2. 역세척 송풍기 seeting(업체방문)

3. 역세척 펌프 회로수정

4. 역세척 관련설치(송풍기, 펌프)FCC수동운전 TEST

※ 중계펌프장 시설용량 : 875,000㎥/일

- 취수장 시설용량 : 1,050,000㎥/일

다음주(7/16 ~ 7/22)작업계획

1. 활성탄 흡착지 세척(2계열)

2. 역세척 펌프 회로수정 및 FCC수동운전 TEST

3. 회수조 유량계 점검

4. 회수펌프 운전점검

3		협의사항

○ 중계펌프 시설에 대해서는 센터에서 공급수량 등을 검토하여 펌프        추가설치 여부를 본부에 요구 예정

○ 각종 기기 및 시설물(활성탄 흡착지, 오존 접촉조 등) 번호부여        방식에 대해서는 서울시 기준 적용토록 세부 번호부여 지침 마련

회의 사진

강북정수장 고도정수처리시설공사	내용	공사현장 합동회의 개최	일자	14. 7. 15