함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	공사 설계변경 계약의뢰 협조요청(2013년 중구 관내 상수도 공사-장기계속)

1. 급수운영과-14194(2014.07.14.)호 및 2013년 중구 관내 상수도공사(장기계속 단가계약) 설계변경 계약의뢰와 관련입니다.

2. 공사 변경계약에 따른 구비서류 중 “공사 계약이행 보증서” 미제출과 관련, 건설공제조합 문의결과 준공기한 이후 보증서 발급 불가하여 계약보증서를 제출할 수 없는 실정입니다.

3. 본 공사건은 이미 2014.7.15.일자로 이상없이 시공 완료된 공사로 계약보증서를 발급하는 것은 불가능하고 현실적으로도 준공(계약기간)이 끝난후 계약보증서를 징구하는 것은 실익이 없음으로 “공사 계약이행 보증서” 첨부 없이 변경계약할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대상공사명 : 2013년 중구 관내 상수도공사(장기계속 단가계약)

나. 도 급 자 :***************

다. 계약기간 : 2014.01.01 ~ 2014.07.15.(총계약기간:2013.07.10 ~ 2014.07.15.)

라. 변경사유 : 물량 증감 및 신규공종 발생에 따른 금액 변경

**************************************************************

*****

구 분	당 초		변 경		비 고
	2차부기금액	총계약금액	2차부기금액	총계약금액
*****	***********	***********	***********	***********	************

첨부 : 1. 계약의뢰 공문(사본) 1부. 끝.

	중부수도사업소장
★주무관	김두수		주무관	오도영		급수운영과장	07/16 김영삼
협조자	주무관	현경선
시행	급수운영과-14391	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	dusu@seoul.go.kr	/	부분공개