문서번호	도로보수과-3259
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	07/16 정진오
협조
	주무관		홍수종

【2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)】

설계변경(1차) 검토보고

2014.  7.   .

·

설계변경(1차) 검토보고

□ 관련근거

○ 건영 본 2014-57(2014.7.14)호 : 설계변경 요청 건

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2014년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 4. 7. ~ 2015. 2. 28.

○ 도  급  자 : ㈜아남공영  이성우

○ 도  급  비 : 327,433,370원

○ 공사개요 : 차선도색 170,500m, 차선제거 8,000m,

도로표지병 설치 420개, 도로표지병 제거 200개

□ 변경 사유

○ 공종별 물량 증․감에 따른 설계변경

□ 설계변경 내역

구 분	단위	수 량			비고
		당초	변경	증․감
차선 도색	m	170,500	157,503	감12,977
차선 제거	m	8,000	12,457	증)4,457
표지병 설치	개	420	160	감200
표지병 제거	개	200	200	-

○ 공사비 변경내역                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	668,807,370	668,807,370	-
도급비	327,433,370	327,433,370	-
관급비	332,270,000	332,270,000	-
이전비	9,104,000	9,104,000	-

□ 예산과목

○ 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표시선 도색 및 제거, 시설비(670,000천원)

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비(도로굴착복구기금 50,000천원)

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공종별 물량조정에 대한 정산설계변경을 시행하여 차선도색 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경(1차) 내역서 1부.

2. 제비율검증 결과 1부. 끝.