문서번호	건축부-8784
결재일자	2014.7.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		장윤수	전결 07/17 이병석
협 조
	경리과장			최영미

「서울거리예술창작센터 조성공사」

설계용역 설계변경 검토

2014. 7.

도시기반시설본부

건 축 부

「서울거리예술창작센터 조성공사」

설계용역 설계변경 검토

「서울거리예술창작센터 조성공사」설계용역과 관련하여 기존 구조물의 안전성 검토를 위한 설계변경 검토

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 서울거리예술창작센터 조성공사 설계용역

○ 위    치 : 서울시 광진구 광장동 17번지외 17필지

○ 규    모

- 제1취수장 : 지하1층~3층(연면적 2,080㎡중 1,398㎡) 리모델링

- 제2취수장 : 지하1층~1층(연면적 1,542㎡중   337㎡) 리모델링

- 취수장관사 : 지상2층(연면적 892㎡) 리모델링

- 염소투입실 : 지상1층(연면적 185㎡) 리모델링

- 변전실/누수사무실(연면적 614㎡) 철거

- 일부 건축물 철거로 펌프를 활용한 전시 및 야외공연, 주민휴식공간 조성

○ 용역기간 : ‘14.1.15 ∼ ’14.8.12

○ 설 계 자 : 유아이에이건축사사무소(주) 손종현

○ 용 역 비 : 86,489천원

□ 추진경위

○ ‘13.08.22 : 구의취수장 공간재활용 및 리모델링 설계 및 공사발주 의뢰

○ ‘13.10.04 : 건축가능여부협의 – 광진구청, 물관리정책과

○ ‘13.11.06 : 설계공모

○ ‘13.12.09 : 설계공모 작품심사

○ ‘14.01.15 : 설계용역 착수

○ ‘14.02.24 : 기본설계보고

○ ‘14.04.24 : 건축협의-광진구청(구조안전확인서, 구조계산서 등 보완 요청,’14.5.9)

□ 설계변경 요청내용

○ 근 거 : 유아이에이********6-1호

○ 요청내용

(단위 : 천원)

구분	설계변경내용	증,감액	비고
용역비	기존 구조물 정밀안전점검	9,500	낙찰율적용(95%)
부가세	10%	950
합계		10,450

□ 처리의견

○ 기존 구조물의 안전성 확보를 위한 내용으로 설계변경 처리하고자 함.

붙 임 설계변경 요청서 1부.  끝.