투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	노출비탈면 강관네일링 수량변경(축소) 실정보고 승인

1.문서번호 : SMIH-14-32349

2.작성일자 : 2014-07-17 10:07:48

3.제    목 : 노출비탈면 강관네일링 수량변경(축소) 실정보고 승인

4.내    용

가. 선사고덕0420-425(2014.7.10.)호 및 토목부-13600(2014.7.15.)호와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”의 노출비탈면(sta.1+440~1+600)흙깎기결과 비탈면하단 중앙부 일부에 암반이 노출되어 사면안정성 검토결과 비탈면안정공(가압식강관네일링, 수평배수공)을 삭제하여도 안정 한 것으로 검토되어 수량변경(축소) 필요하여 실정보고 한 사항에 대하여 승인 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. 끝.

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					07/17 최광무
협조자
시행			토목부-13740									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화								/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개