투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부)-강서 설계변경(1차) 시행

「2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부)-강서」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(강서,영등포일부)-강서

2. 공사기간 : 2014.04.08 ~ 2015.02.28

3. 도 급 자 : 진흥전력설비(주)  대표 서정웅

4. 설계변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	386,969,200	530,000,000	증) 143,030,800
도 급 비	351,969,200	480,000,000	증) 128,030,800
관 급 비	20,000,000	30,000,000	증) 10,000,000
이 전 비	15,000,000	20,000,000	증) 5,000,000

5. 설계변경 사유 : 본 공사는 강서구 및 영등포구(일부) 지역에 대한 교통신호기 신설 및 보수를 위한 공사로, 현재 공사금액의 상당부분을 집행한 상태로, 2015년 2월까지 교통신호기 신설 및 보수, 긴급 민원처리 등을 위해 사용할 공사비를 확보하기 위함.

6. 예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 감리 기술검토의견서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	박태진		주무관	한영호		기전과장	박재경		강서도로사업소장	07/17 이규상
협조자	계약1팀장	김점선
시행	기전과-9000	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개