투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 [신림2 빗물펌프장 설치공사]

1. 서울특별시도시기반시설본부 방재시설부-5867호(2014.7.8.)와 관련입니다.

2. 신림2 빗물펌프장 설치공사 관련 교통안전시설물설치 원인자부담공사의 공사기간 변경을 아래와 같이 승인하오니 교통사고 예방 및 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

나. 공사기간

- 당초 : 2013.4.01 ~ 2014.6.30

- 변경 : 2013.4.01 ~ 2014.12.15

다. 변경사유 : 계약서상의 준공기한과 동일하게 변경

라. 공사장소 : 관악구 신림동474번지(주생빌딩)

마. 원 인 자 : 서울특별시 도시기반시설본부

바. 공사관리번호 : 신호 2013-1101-021

표지 2013-0208-002

사. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	㈜건영이엔씨	㈜건영이엔씨	㈜대로전설	교통신호기설치공사 1식
표 지	㈜건영이엔씨	㈜건영이엔씨	케이로드	교통안전표지공사 1식

3. 공사완료후 7일 이내에 준공요청 공문과 준공서류(감리경유)를 제출하여 주시기 바랍니다.(준공관련 도면, 준공사진, 기타 관련서류 등 CD포함 이메일 발송) 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	박종근		기전과장	07/17 유재옥
협조자	주무관	代허송욱
시행	기전과-3272	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동)	/
전화	(02)3284-5458	/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개