투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행[2014년 중대한 교통사고지점 개선 교통신호기공사]

1. 기전과-6628호(2014.07.17)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 중대한 교통사고지점 교차로의 신호체계 정비를 위해 추진한 교통신호기공사에 대하여 책임감리사로부터 설계변경(정산) 보고가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경(정산)을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 중대한 교통사고지점 개선 교통신호기공사

(상도교~도봉파크빌)

나. 공사기간 : 2014. 5. 29 ~ 2014. 9. 30

다. 시공업체 : (주)디씨엠전력 대표 강승우

라. 공사금액 : 금19,285,200원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	19,285,200	21,200,000	1,914,800(증)	-

❍ 설계변경 사유

- 유관기관의 지장물 이설 요청으로 차량지주 1본 이설에 따른 물량 변경 및 교통정리요원 배치 등 현장여건을 반영하여 공사 물량 증‧감 등 기타 제경비 정산

바. 예산과목 : 도시교통체계및소통개선, 교통소통및안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비

붙임 : 1. 설계변경(정산) 방침서 1부.

2. 설계변경(정산) 보고(책임감리사) 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제비율검증서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

주무관	박정민		기전과장	07/18 정윤식
협조자	주무관	박신범		주무관	박경우		관리단속과장	정수현
시행	기전과-6646	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 768 (번2동 365-1)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5476	/전송	02-945-5074	/	jmp7019@seoul.go.kr	/	대시민공개