문서번호	녹지관리과-3436
결재일자	2014.7.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	녹지관리과장
김기수		김원식	07/18 김영준
협조	총무과장		최대봉
	주무관		장보금

『2014년 한강공원 운동시설 확충 및 정비공사』 설계변경 검토보고

한강사업본부

(녹지관리과)

『2014년 한강공원 운동시설 확충 및 정비공사』

설계변경 검토보고

『2014년 한강공원 운동시설 확충 및 정비공사』 시행과 관련하여 현장여건 변경사항 및 주민 건의사항을 반영하고자 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

공사현황

공 사 명 : 2014년 한강공원 운동시설 확충 및 정비공사

도급금액 : 금191,252,800원

공사기간 : 2014. 05. 23 ~ 2014. 07. 20

공사내용

- 식 재 공 : 이팝 38주, 사철 등 2종 2,410주

- 시 설 물 : 농구장1면, 족구장2면, 전통그네1개, 에어건1개

야외운동기구 16개, 우레탄포장 548㎡, 고무칩포장 375㎡  등

도 급 자 : 수프로(주) 대표 채일

설계변경내용

구 분	변 경 내 용	비 고
식재 및 시설물 정비	▷ 한강철교 주변 야외운동기구 이설 위치 및 수량 변경 - 위치 : 한강철교 하부 → 신규 농구장 설치지역 - 이설 및 철거 수량 : 10개소 → 8개소, 철거 : 0 → 3개소 - 바닥 포장면적 변경 ‧ 블록포장 : 107.7㎡ → 186㎡ ‧ 경계석 : 50.4m → 74m ▷ 한강대교 주변 기존 평의자 이설 수량 변경 - 평의자 이설 : 10개소 → 6개소 ▷ 농구장 및 족구장 배치 방향 변경 : 동‧서 방향 → 남‧북 방향 ▷ 우기시 우수흐름에 지장이 없도록 농구장‧족구장의 배수시설 변경 - 콘크리트관 10m → 이중벽관 48m - 집수정 추가 : 0 → 1개소	기승인 녹지관리과 3323호 3416호

구 분	변 경 내 용	비 고
식재 및 시설물 정비	▷ 현장여건에 맞게 이촌지구( 한강대교 및 원효대교) 식재물량 변경 - 이팝나무 : 37주 → 30주 - 사철나무 : 1,440주 → 380주 ▷ 이촌지구의 비구방지휀스 규격변경 및 농구장에 추가 반영 - 휀스규격 변경 : W2,000×H3,000 → W2,000×H2,000 - 농구장 경계부 비구방지 휀스 추가 설치 : 0 → 33.5경간 ▷ 원효대교 하부 콘크리트 철거물량 변경 - 22.5㎥ → 33.75㎥ ▷ 원효대교 하부 야외 운동기구 및 자전거보관대 철거 ‧ 이설물량 변경 - 야외 운동기구 ‧ 철거: 9개소 → 6개소, 이설: 0 → 1개소, 존치: 0 → 2개소 - 자전거보관대 이설 : 3개소 → 2개소 ▷ 원효대교 하부 녹지경계석 추가 반영 : 0 → 45m ▷ 난지공원의 족구장 설치위치 조정에 따른 물량 변경 - 마사토 포장 : 228㎡ → 480㎡ - 경계목 설치 : 0 → 92m - 부직포 깔기 : 0 → 184㎡ ▷ 난지공원 야외 운동기구 설치위치 조정에 따른 물량 변경 - 경계석(직선) : 25m → 0, 경계석(곡선) : 17.2m → 34.4m ▷ 족구장 및 운동기구 위치 조정에 따른 식재물량 변경 - 이팝나무 : 1주 → 6주 - 사철나무 : 580주 → 0 - 산철쭉 : 390주 → 0 ▷ 현황에 맞게 비구방지휀스 설치 물량 변경 - 뚝섬한강공원 비구방지휀스 : 67.5경간 → 88경간 - 반포한강공원 비구방지휀스 : 50경간 → 45경간 ▷ 블록포장 품질향상을 위해 기층부 부직포 깔기 반영 - 부직포깔기 : 0 → 281㎡ ▷ 이촌 및 난지지구 족구장의 라인벨트 시공방법 변경 - 매립형 → 벨트형(테입형) ▷ 조정된 현장여건을 반영하여 제주석 물량 삭제 - 제주석(T30): 69㎡ → 0 ▷ 증가된 콘크리트 블록 물량은 사급 자재 반영	기승인 녹지관리과 3323호, 3416호

변경금액 (도급비 증4,910,200원)

(단위:원)

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		316,405,070	321,315,270	증4,910,200
도 급 비	공급가액	173,866,182	178,330,000	증4,463,818
	부가가치세	17,386,618	17,833,000	증446,382
	계	191,252,800	196,163,000	증4,910,200
관급자재비		125,152,270	125,152,270	-

검토의견

설계변경사항은 실정보고후 기 승인된 사항(녹지관리과-3323호 및 녹지관리과-3416호)으로 현장여건에 맞게 물량조정 사항을 반영하고자 하며,

본부장님 자전거순찰 지시사항(난지 이색자전거 체험장 운동시설 용도전환)을 반영하고 주민들의 건의사항과 관련 뚝섬한강공원 축구장 비구방지휀스 설치시 자전거와의 충돌사고 예방을 위해 자전거도로변으로 비구방지휀스 설치위치 변경이 필요함에 따라 불가피하게 증액되는 사항은 본 공사의 집행잔액(한강공원이용시설보수정비, 시설비)을 활용하여 반영하고자 함.

붙임  1. 감독기관(시설관리공단) 관련공문 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율검증대장 1부.    끝.