문서번호	시설보수과-2789
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	07/18 정진오
협 조

『중랑교 보수ㆍ보강공사』

교량슬래브 성능개선 실정보고 검토

2014. 7

성동도로사업소

【 시 설 보 수 과 】

『중랑교 보수ㆍ보강공사』

교량슬래브 성능개선 실정보고 검토

우리사업소에서 추진중인『중랑교 보수ㆍ보강공사』와 관련, 감독기관의 교량슬래브 성능개선 실정보고 사항에 대하여 검토 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

공 사 명 : 중랑교 보수ㆍ보강공사

공사기간 : 2013.05.02 ~ 2014.12.31(총차)

(2차 : 2014.03.05 ~ 2014.07.30)

도 급 액 : 3,021,010,230원(2차 : 1,790,463,200원)

공사개요 : 교면포장 30a, 슬래브강결 154m, 난간철거 및 재설치 308m

신축이음교체 200m, 단면증설 2,184㎡, 교량받침 168개소 등

도 급 자 : 유성건설주식회사 대표 이영주

Ⅱ		실정보고 사항

관련근거

○ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-11543(2014.07.18)

실정보고 내용

【 현황 및 문제점 】

○ 교량 성능개선(DB18 ⇒ DB24)을 위한 슬래브하부 탄소리바 보강  구간에 당초 설계도서와 상이하게 굴곡(단면축소 T=15cm)지점이  위치하고 있어 탄소리바 절곡시공이 불가한 실정임

※ 탄소리바 시공순서

- 슬래브하부 치핑(10mm) ⇒ 탄소리바 설치 ⇒ 단면증설(30mm)

○ 현황도(G11~G12)

【 감독기관 검토사항 】

○ 단면 축소부분 단면복구 후 탄소리바 설치 및 단면증설

※ 공단 자체 기술심의 및 설계사 자문의견

탄소리바

○ 주요공종 변경사항〔증49,000천원〕

공 종	규 격	단위	수 량		비고(증감)
			당 초	변 경
단면증설	t=30mm	㎡	2,184	2,093	감) 91
단면증설	t=150mm	㎡	0	91	증) 91

Ⅲ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 실정보고에 대하여 검토한 바 감독기관의 검토의견과 같이 시행함이 타당할 것으로 사료되어 본 공사에 반영하도록 조치하고,

○ 공사비 증ㆍ감사항에 대하여는 추후 설계변경시 정산 반영하여, 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  실정보고(시설관리공단) 각 1부.  끝.