문서번호	기전과-5061
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	기전과장
채희준	07/18 최주용

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)-1구역』

감리실정보고서 검토 보고(1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)-1구역』

감리실정보고서 검토 보고(1회)

교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)-1구역 제1,2,3,5차 작업지시에 대한 감리원의 공사 실정보고가 있어 의견검토후 결과 보고 드림

□ 관련근거

○ ㈜영호이앤씨 용호 본14-07-11호(2014.07.17.) 실정보고서 제출건

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1구역)

○ 작업기간 : 지시일로부터 ~ 2014.07.31

○ 도 급 자 : 동서전기건설고사 대표 박진규

○ 책임감리 : ㈜영호이앤씨 이희정

□ 감리원 의견 및 검토결과

○ 1차 작업지시 변경내용

연번	위 치	작업내용 및 현황	감 리 의 견	검 토 결 과
1	동의초교	-P1지주옆 제어기 설치	-제어기위치를 변경하여 시공 함이 타당함(지장물 있음)	-현장 여건에 맞게 규격 등 변경한 사항으로 감리의견 승인함이 타당함
2	뚝섬역 3번출구	-보행지주 1본이설	-한전주 옆 설치가 불가하여 위치 변경함이 타당함	-현장 여건에 적합하게 보행지주 이설함이 타당함
3	동부제일 병원앞	-제어기좌대 콘크 리트 철거로 설계	-좌대가 지주형으로 설치 되어 있음(재사용)	-설계내역 적합하게 수정함이 타당함
4	구의수원 지 경보	-경보지주 이설 (경보제어기 1개 고장)	-경보제어기 교체 및 신호케 이블 배선 변경(감 51M) 등 시공변경함이 타당함	-현장 여건에 적합하게 시공 승인함이 타당함

연번	위 치	작업내용 및 현황	감 리 의 견	검 토 결 과
5	금호벽산 아파트	-지주형 좌대기초 설치	-좌대기초 재사용함이 타당	-현장여건에 적합하게 시공 승인함이 타당함
6	응봉교	-지주형 좌대기초 설치	-좌대기초 재사용함이 타당 -보드(APS,PIO) 추가반영	-현장여건에 적합하게 시공 승인함이 타당함
7	한양대앞	-지주형 좌대기초 설치	-좌대기초 재사용함이 타당	-현장여건에 적합하게 시공 승인함이 타당함
8	장안초교	-지주형 좌대기초 설치	-좌대기초 재사용함이 타당	-현장여건에 적합하게 시공 승인함이 타당함
9	면목역	-지주형 좌대기초 설치	-좌대기초 재사용함이 타당	-현장여건에 적합하게 시공 승인함이 타당함
10	공통사항	-지주설치시 보도블 록 가복구누락 -거푸집 전면거푸집 사용으로 설계됨 -클램프 작업변경 -조가선 강연선은 작업이 불가능함	-지주설치 및 철거시 보도 블록 가복구가 누락됨 -거푸집 상단 50CM만 반영 함이 타당함 -소등시간 단축을 위하여 애자 및 밴드로 변경 -조가선 6MM사용함이 타당함	-설계변경시 반영함이 타당 하다 판단됨
11	기 타	-안전용품이 내역에 미반영됨	-안전용품 내역에 반영함이 타당함 안내간판 2개, 안내표지 2매 가림막 휀스 15개, 라바콘 30개	-안전용품 설계내역에 반영함이 타당함

☞ 1차 개략 변경금액

변경전 도급비	변경후 도급비	증 감	비 고
231,480,225원	222,948,000원	감8,532,225원

○ 2차 작업지시 변경내용

연번	위 치	작업내용 및 현황	감 리 의 견	검 토 결 과
1	세일카 센타	-표준형 제어기 설치(관급) 1대 -보도굴착 6m -디자인지주 설계	-보도가 협소하여 지주부착형 제어기로 변경함이 타당함 -보도굴착은 해당 없음 -주변에 용융지주로 설치되어 예산절감차원에서 용융설치	-현장 여건에 맞게 규격 등 변경한 사항으로 감리의견 승인함이 타당함

☞ 2차 개략 변경금액

변경전 도급비	변경후 도급비	증 감	비 고
18,009,568원	22,462,000원	증4,452,432원

○ 3차 작업지시 변경내용

연번	위 치	작업내용 및 현황	감 리 의 견	검 토 결 과
1	워커힐 입구	-전원선(72m) 및 전송선(85m) 신설 -핸드홀(600) 설치	-인입지점 변경시공 가공선 37m, 전송선 50m 및 핸드홀 규격 변경함이 타당함	-현장 여건에 맞게 규격 등 변경한 사항으로 감리의견 승인함이 타당함
2	예술고등 학교	-디자인지주로설계	-이면도로로 예산절감차원에서 용융지주로 변경함이 타당	-현장 여건에 맞게 변경 승인함이 타당함

☞ 3차 개략 변경금액

변경전 도급비	변경후 도급비	증 감	비 고
40,800,641원	35,728,000원	감5,072,641원

○ 5차 작업지시 변경내용

연번	위 치	작업내용 및 현황	감 리 의 견	검 토 결 과
1	관내	-중랑구,성동구 면수 조정 3색271조,4색50조	-현장여건에 적합하게 철거 시공 3색 257조, 4색 50조	-현장 여건에 맞게 변경 승인함이 타당함

☞ 5차 개략 변경금액

변경전 도급비	변경후 도급비	증 감	비 고
60,109,959원	55,198,000원	감4,911,959원

□ 조치의견

○ 공사실정 보고에 대한 감리원의 의견을 검토한 결과 보고내용에 타당성이 있어 이를 현장여건에 맞도록 설계변경 및 시공토록 감리자에게 지시하고자 합니다.

첨부 : 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)-1구역 감리실정보고서 1부. 끝.