문서번호	치수과-2793
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
최혜경		김용제	07/18 차광재
협조
	주무관		박정태

한강공원 자양나들목 개선

타당성조사 용역 완료보고

2014. 7

시설부

「한강공원 자양나들목 개선 타당성조사 용역」

완  료  보  고  서

한강공원 자양나들목 개선 타당성조사 용역을 완료하고 결과를 보고드림

용역개요

❍ 용 역 명 : 한강공원 자양나들목 개선 타당성조사 용역

❍ 용역기간 : 2013.08.05 ~ 2014.06.30

❍ 용 역 비 : 27,000천원

❍ 용 역 사 : ㈜동일기술공사  대표 김수보

❍ 용역목적 : 자양나들목 보행자 및 차량의 이용불편해소 및 안전한 통행로 확보를 위한 개선공사에 대한 타당성 검토

추진경위

❍ 2012. 4.20  제237회 시의회 시정질문 (박래학 시의원)

- 자양나들목 일방향에서 양방향으로 차량통행변경하고 보행자전용 나들목 신설요청

❍ 2012. 11.   2013년 자양나들목 타당성조사 예산편성 (100백만원)

❍ 2013. 5.25  투자심사위원회 상정

- 기존나들목이 다수 있으므로 추가 신설보다는 차량속도제한 등 운영방법 개선을 통한 차량 및 보행자 안전 확보방안 등 재검토

- 차량 및 보행자의 이용량 · 현황 분석과 사업 시행에 대한 심도 있는 검토가 필요

❍ 2013. 8.05  보행자전용 나들목 신설에 대한 타당성조사 용역 착수

❍ 2014. 5.20  서울연구원 타당성조사 검증

❍ 2014. 6.30  자양나들목 개선 타당성조사 용역 준공

나들목 현황

자양나들목 운영 변천사

‘10년 12월 이전	․ 보도폭이 좁아 보행인들의 잦은 시비 및 차량안전사고 수시발생 ․ 보행자통행 나들목 신설 설치 민원 발생

‘10년 12월 ~‘12년 7월 (1년 8개월)	․ 자양중앙나들목(‘10년12월 준공)과 연계하여 차량 일방통행으로 운영

‘12년 7월 ~ 현재	․ ‘10년 12월 차량 일방통행으로 인한 지역주민 민원발생(자양3동 550명) ․ ‘12년 4월 박래학 시의원 시정질문(차량 양방향통행 및 보행로 신설 요구) ․ ‘12년 7월 차량 양방향통행으로 환원(자양 2,3동 주민의견 수렴) ․ ‘13년 5월 투자심사위원회 재검토지시(보행로 신설은 타당성 부족함)

타당성조사 결과보고

❍ 조사개요 : 기존의 통로 박스에 인접하여 새로운 보행자전용 나들목 신설

❍ 경제성 분석결과 (용역)

- 편익비용비(B/C)  0.90

※ 경제성 확보기준  B/C>1.0

❍ 검증실시 (서울연구원 서울공공투자관리센터)

- 편익비용비(B/C)  0.67

- 운영방법 개선검토 제안 : 보도 폭원의 협소로 인한 이용불편을 초래하고 있어, 운영방법 개선을 검토하여 보행불편을 최소화하는 방안 필요

❍ 결론 : 타당성 조사용역의 경제성 분석결과의 경우도 경제성이 1이하로 낮으며, 검증기관인 서울연구원도 경제성을 확보하지 못하는 것으로 검토되었음

운영방안 제안(서울연구원)

❍ 신호기에 의한 운영방안 : - 한쪽 통로를 보행전용으로 전환하고, 다른 통로는 차량전용으로 신호기로 양방통행시키는 방안

❍ 보차공용으로 변경후 블록포장 방안 : - 보행자, 자전거, 차량 등이 함께 이용 - 속도저감을 위해 내부 블록형포장 적용	<예시>