문서번호	도시철도토목부-7938
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토목1과장	도시철도토목부장
문병종	김성호	07/21 이은상

938정거장 연암구간 굴착공법 변경 검토 보고

2014. 07.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	923공구 입찰안내서	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『서울지하철 9호선 3단계923공구』

938정거장 굴착공법 변경 검토 보고

지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 책임감리원으로부터 938정거장에 연접해 있는 보성사(목조 와가 단층)건물 변형 최소화 및 보훈병원 중증환자 보호를 위한 굴착공법 변경 승인요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

동명감923 제2014-192호(2014.07.14.)

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철9호선 3단계 923공구 건설공사

❍ 사업규모 : 총연장 1,728m (정거장 1개소)

❍ 사업기간 : ‘10.09.20~’16.03.21

❍ 공 사 비 : 98,224백만원

❍ 시공사/감리사 : 대림산업(주) 외4 / ㈜동명기술공단건축사사무소 외3

Ⅱ		설계 및 시공현황

❍ 암반노출구간 : 938정거장 STA40K737 ~ 40K787(L=50m)

- 평면도

암반노출 구간

최소거리 : 575757m

설계상 예정암반선

※ 규모 : 폭8.6m, 높이6.7m

- 단면 및 현황도

변경암반선 굴착심도 15.5m 12.1m 11.3m 당초암반선	암반노출 예정암반선

‧ 938정거장 암반 노출구간에서 보성사까지 이격 거리 : 57m

‧ 938정거장 암반  노출구간에서 보훈병원까지 이격거리 : 74m

- 굴착공법

‧ 당초설계 : 암발파(리핑+발파)

‧ 현재시공 : 기계굴착(브레이커 암 깨기)

- 가시설공법 : H-PILE+토류벽콘크리트, 숏크리트

Ⅲ		현 실태 및 문제점

❍ 당초에는 암발파(리핑+발파)공법으로 설계되어 있으나 작업장과 연접하여  있는 보성사(목조 와가) 건물에 발파진동으로 인해 일부 변형 등이 발생되고,

❍ 보훈병원에는 중증환자가 대부분 입원하고 있어 진동•소음에 대한 민원이  계속되고 있음

Ⅴ		책임감리원 의견

❍ 938정거장과 연접한 보성사 건물 및 보훈병원에 입원해 있는 중증환자를 보호하기 위해 현재 시공하고 있는 기계굴착 공법을 무진동 암파쇄 공법(PRS)으로 변경하고자 하며 추가되는 공사비(414,386천원)는 추후정산 반영하되 총공사비는 증액없이 조정하고자 함

- 물량 및 공사비 증•감 현황

구 분		단위	수 량			단 가	금 액	비고
			설 계	기시공	잔 량
당초	기계	㎥	787	-	787	7,195	감) 5,662,465
	발파	㎥	4,084	-	4,084	15,180	감) 61,995,120
	소계	㎥	4,871	-	4,871		감) 67,657,585
변경	기계	㎥	276	276	-	7,195	증) 1,985,820	풍화암 굴착적용
	무진동 (신규단가)	㎥	4,595	-	4,595	104,474	증)480,058,030
	소 계	㎥	4,871	276	4,595		증)482,043,850
증∙감							증)414,386,265	직접공사비

※ 단가적용

- 공사입찰안내서 제3장 계약조건(공사계약 일반조건) Ⅶ. 계약금액의 조정, 1.설계       변경으로 인한 계약금액 조정

Ⅵ		조치의견

❍ 책임감리원 의견과 같이 무진동 암파쇄 공법으로 변경승인코자 하며 추가되는      공사비(482백만원)는 작업완료후 총공사비 증액없이 정산코자 함

붙임 : 책임감리원의 굴착공법 변경 승인 요청서 1부. 끝.