다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국전력공사 사장
(경유)	경인건설처
제목	공사계획(변경) 신고 수리(154kV방학변전소 건설공사)

1. 한국전력공사 경인건(변)61102-894(2014.7.11.), 녹색에너지과-13868(2013.7.17.) 호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 공사계획(변경) 신고한 『154kV방학변전소 건설공사』에 대하여 전기사업법 제 61조 제3항의 규정에 따라 아래와 같이 수리하고 알려드리니, 같은법 제63조에 의거 공사완료 후 사용전검사를 필하시고 안전하게 사용하시기 바랍니다.

○ 공사계획(변경) 신고내용

신고인			공 사 개 요
업체명	대표자	소재지
한국 전력공사 경인건설처	김강규	서울중구 퇴계로 140	○ 공사명 : 154kV방학변전소 건설공사 ○ 공사변경내역 : 준공예정일 변경 - 당초 : 2014. 7. 14. - 변경 : 2015. 7. 14. ○ 변경사유 : 사업시행자와 소송으로 인한 공사지연 ○ 공사기간 : 2012. 7. 20 ~ 2015. 7. 14. ○ 감리원(상주) : 이희대(특급), 오중탁(초급) ○ 시공사 : (주)경원전력

붙임 : 서면심사 확인결과서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	안계훈		전력관리팀장	이영목		녹색에너지과장	07/21 권민
협조자
시행	녹색에너지과-13941	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 11층	/
전화	02)2133-3712	/전송	02)2133-1020	/	ankhoon@seoul.go.kr	/	대시민공개