함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약의뢰(역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명  : 역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사

나. 공사개요 : 당초 D=20~400mm, L=1,844m

변경 D=20~400mm, L=1,810m

다. 계약상대자 : 유림환경(주) 대표 최용우

라. 계약  기간  : 2014. 3. 21 ~ 2014. 7. 21

마. 예산  과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(세척갱생관정비)

바. 하자  기간 : 준공검사일로부터 3년

사. 변경  금액                                               단위:원

구분	당초	변경	증․감	비고
총공사비	1,069,706,510	1,069,706,510	-
도급비	486,301,510	453,200,000	(감)33,101,510
관급비	246,030,000	234,190,000	(감)11,840,000
도로복구비 및 기타	337,375,000	382,316,510	(증)44,941,510

붙 임 : 1) 설계변경 시행, 심의결과서 각 1부.

2) 설계변경 내역서, 제비율검증, 합의서 각 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	박홍선		급수운영과장	07/21 최임봉
협조자
시행	급수운영과-15085	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 도곡2동 422~461 459-4	/
전화	3146-4852	/전송	3146-4889	/		/	대시민공개