투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(서남권 글로벌센터 개보수 통신공사)

「서남권 글로벌센터 개보수 통신공사」에 대하여 다음과 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서남권 글로벌센터 개보수 통신공사

나. 계약업체 : (주)태일정보시스템

다. 공사기간 : 2014. 3. 26 ~ 2014. 7. 23

라. 설계변경 내역(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 액	83,318,000	88,979,000	증 5,661,000

마. 예산과목 : 글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회조성, 외국인 생활 지원 강화, 외국인 지원시설 설치·운영, 시설비

붙임 : 1. 설계변경(정산)보고서 및 합의각서 각 1부.

2. 설계변경(정산)내역서 및 제비율 검증표 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이재홍		녹색성장과장	代김인호		설비부장	07/21 박기형
협조자	경리과장	최영미
시행	설비부-7975	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8638	/전송	02-3708-8659	/	hong2495@seoul.go.kr	/	대시민공개