투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	용마터널 공사비 협의 요청

1. 도로계획과-8973(2014.7.14.)호 및 용마터널 2014-156(2014.7.21.)와 관련입니다

2. “용마터널 민간투자사업”오염저감시설 추가 설계변경과 관련하여 귀 부서에서 위 호와 같이“현재 제출된 설계도서로 확정하여 공사시행”을 회신하였으나,

3. 공사비가 책정되지 않아 시행사와 도급업체간의 변경계약 체결 불가로 공사수행에 지장이 있으니, 오염저감시설 설치 공사기간(4개월)을 감안하여 공사비를 시행사와 협의 조치하여 주시기 바랍니다

따로붙임 : 설계변경 승인 재요청(용마터널 주식회사) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	추한영		열빛총괄과장	권오식		설비부장	07/21 박기형
협조자
시행	설비부-7974	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8610	/전송	02-3708-8659	/	cc2436@seoul.go.kr	/	부분공개