문서번호	토목부-14014
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
김구		07/21 노우성
협조
	주무관		양준식

구룡지하차도 구간 기존광역상수도관 철거수량 변경보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

토 목 부

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

구룡지하차도 구간 기존광역상수도관 철거 수량 변경 보고

구룡지하차도 U-TYPE 구간에 기존 광역상수도관 철거 관련하여 당초 설계에 가시설 공사 없이 철거토록 반영되어 있어 추가 검토가 필요하고 지하차도 구조물에 간섭이 없는 토공구간의 광역상수도관은 존치하는 방안을 보고드림

관련근거

❍ 동기강 2014-132호(`14.6.26.) 구룡지하차도 구간 광역상수도관 철거수량 변경 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 1개소, 지하차도 3개소)

❍ 공 사 비 : 221,555백만원 (7차: 8,906,500천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(7차 `13.5.9.~`14.9.30.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1,   ❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

감리단 보고내용

❍ 보고내용

- 구룡지하차도 U-type구간 기존광역상수도관은 당초 설계에 가시설 설치공사없이 철거토록 반영되어 있으나 현장여건과 안전을 고려하여 추가로 가시설(L=120m, H=6.1m)이 필요함.

- 지하차도 구조물에 간섭이 없는 70m구간(토공부)은 기존광역상수도관   미 철거로 존치

- 당초 내역서에 반영된 광역상수도관 철거수량 60m는 설계오류사항으로 물량 삭제

❍ 평면도

당 초

변 경

❍ 단면도

구 분	당 초	변 경
지하차도부 (L=120m)
	- 가시설 없음	- 가시설 추가(H=6.1m)
토공부 (L=70m)
내 용	- 가시설 설치	- 광역상수도관 미 철거

❍ 철거수량 변경 현황

구 분		당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
구룡 지하차도	지하차도구간	120m	120m	70m
	토 공 부	70m	-
	설계오류	60m	-	60m
	계	250m	120m	130m

❍ 공사비 증･감 현황                                      (단위:천원)

구 분		당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
1.철거구간 (190m→120m)	1. 강관절단	15,567	9,730	5,837
	2. 강관철거	47,846	30,218	17,628
	3. 고재대	-80,397	-50,777	29,620
	4. 가시설 설치	90,325	87,567	2,758
	5. 직접공사비	73,341	76,738	3,397
	6. 제경비	22,469	23,362	893
	7. 합 계	95,810	100,100	4,290
2.설계오류 (60m→0m)	1. 강관절단	4,930	-	4,930
	2. 강관철거	15,109	-	15,109
	3. 고재대	-25,388	-	25,388
	4. 직접공사비	-5,349	-	5,349
	5. 제경비	-1,361	-	1,361
	6. 합 계	-6,710	-	6,710
총 공 사 비		89,100	100,100	11,000

조치계획

❍ 감리단 검토의견에 따라 추후 설계변경하여 도급비에 반영토록 조치코자 함.

【붙 임】: 감리검토의견서 1부.  끝.