문서번호	설비부-7945
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	07/21 박기형
협조

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

(서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사)

2014.  7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

(서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사)

서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사 관련, 선행공종(토목) 지연에 따른 관급자재(터널용등기구) 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

관련 공문

□ 관급자재 납품기한 연기 요청[서남권(감)2014-190호(2014.07.21.)]

사업개요

□ 사 업 명 : 터널용등기구 외 11종 구매

□ 납품기한 : 2014. 06. 19 ~ 2014. 07. 30

□ 계약금액 : 금77,814,000원

□ 계약업체 : ㈜한영전기

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

공 종	납품기한		비 고
	당 초	변 경
터널용등기구	2014. 07. 30	2014. 10. 25	계약금액 변동없음

□ 연기사유 : 선행공종(토목) 지연에 따른 터널용등기구 설치시기 미도래

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(납품사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 하천점용허가 등 선행공정 지연으로 터널용등기구 납품기한 연기가 불가피 함.

□ 납품기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기 의뢰코자 함. 끝.