문서번호	설비부-7943
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	07/21 박기형
협조

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

(성암로 병목구간 개선 전기공사)

2014.  7.

도시기반시설본부

(설  비  부)

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

(성암로 병목구간 개선 전기공사)

성암로 병목구간 개선 전기공사 관련, 선행공종(토목) 지연에 따른 관급자재(가로등기구) 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

관련 공문

□ 관급자재 납품기한 연기 요청[공사감독처-6931(2014.07.18.)]

사업개요

□ 사 업 명 : 가로등주 외 7종 구매(성암로 병목구간 개선 전기공사)

□ 납품기한 : 2014. 05. 14 ~ 2014. 07. 30

□ 계약금액 : 금11,005,000원

□ 계약업체 : 에이컴조명㈜

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

공 종	납품기한		비 고
	당 초	변 경
가로등기구	2014. 07. 30	2014. 12. 31	계약금액 변동없음

□ 연기사유 : 선행공종(토목) 지연에 따른 설치시기 미도래

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(납품사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 성암로 옹벽 기초설치 공정 지연으로 가로등기구 납품기한 연기가 불가피 함.

□ 납품기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기 의뢰코자 함. 끝.