투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납기 연기 요청《잠원2 빗물펌프장 신설공사》

우리부에서 시행 중인 『잠원2 빗물펌프장 신설공사』에 사용될 관급자재에  대하여 다음과 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 「잠원2 빗물펌프장 신설공사」

나. 품  명 : 이형철근 및 레미콘, 아스콘

다. 변경내역 :

품명	계약번호	규격	단위	계약수량	납품기한		계약자	비 고 (납품요구번호
					당초	변경
이형 철근	00126118400	D13(SD300)	톤	6.177	‘14.07.02	‘15.12.31	환영철강공업 (주)	121312185400
	00136111200	D13(SD300)	톤	8.704	‘14.07.02	‘15.12.31		121315882300
	00126118400	D19(SD300)	톤	0.459	‘14.07.02	‘15.12.31		121312185400
	00136111200	D19(SD300)	톤	0.807	‘14.07.02	‘15.12.31		121315882300
	00136111200	D29(SD300)	톤	84	‘14.07.02	‘15.12.31		121315778800
	00126118400	HD19(SD400)	톤	55.745	‘14.07.02	‘15.12.31		121312185400
		HD22(SD400)	톤	70.117	‘14.07.02	‘15.12.31
		HD29(SD400)	톤	54.519	‘14.07.02	‘15.12.31
레미콘	12121059000	25-18-08	㎥	128	‘14.07.02	‘15.12.31	서울경인레미콘공업(협)	121312326100
		25-27-15	㎥	411	‘14.07.02	‘15.12.31
		25-18-15	㎥	46	‘14.07.02	‘15.12.31
		25-21-08	㎥	57	‘14.07.02	‘15.12.31
		25-21-15	㎥	400	‘14.07.02	‘15.12.31
	12131069001			557	‘14.07.02	‘15.12.31		121315875100
	12121059000	25-24-15	㎥	13	‘14.07.02	‘15.12.31		121312326100
아스팔트콘크리트	12121057901	일반품, 표층용 WC-2(＃78)	톤	473	‘14.07.02	‘15.12.31	서울경인아스콘공업(협)	121312182200
		일반품, 기층용 BB-2(＃467)	톤	710	‘14.07.02	‘15.12.31

라. 변경사유 : 사용시기 미도래에 따른 납품기한 연기.  끝.

	방재시설부장
★주무관	최연섭		방재시설과장	서관석		방재시설부장	07/21 임춘근
협조자	주무관	이병환
시행	방재시설부-6458	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 방재시설부(2동 2층)	/
전화	02-3708-8775	/전송		/		/	대시민공개