문서번호	교통운영과-13607
결재일자	2014.7.21.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호운영팀장	교통운영과장
강영석		고광섭	07/21 강진동
협조	주무관		박우동
	주무관		구영수

- 2014년 제2회 교통신호제어기 유지보수 용역 -

부분준공검사 결과보고(동북권역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통운영과

(신호운영팀)

- 2014년 제2회 교통신호제어기 유지보수 용역 -

부분준공검사 결과보고(동북권역)

2014년 교통신호제어기 유지보수용역에 대한 제2회 부분준공(용역기간: 2014.5.1.~6.30)을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 검사개요

❍ 사 업 명 : 2014년 교통신호제어기 유지보수 용역(동북권역)

❍ 사업기간 : 2014.3.1.~2015.2.28

❍ 계약업체 : ㈜에이앤비정보기술

❍ 계약금액 : 금610,781,800원

❍ 검사방법 : 제2회 부분준공 기간내 수행한 용역 추진실적 점검

□ 과업범위

❍ 동대문구, 광진구, 중랑구, 노원구, 도봉구, 성북구, 강북구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간 : 2014.5.1. ~6.30 (2개월)

□ 추진실적

❍ 시설물 현황 (동북권역)

- 기준 : 2014.6.30. -

교통신호제어기					차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준	전자	일반	신설
1,002	953	5	44	2	175	160	1,844	2,011

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
5월	193	71	35	87
6월	235	76	39	120
누계	428	147	74	207
총계	840	303	142	395

❍ 현장작업

구분	총계	온라인	D/B	사업소이첩	기타	광통신	WCMS	표준화	기타	보행자작동신호기	차량검지기	음향신호기	잔여표시기
5월	250	119	71	0	0	0	14	6	0	40	0	0	0
6월	170	83	22	0	0	0	14	4	0	47	0	0	0
누계	420	202	93	0	0	0	28	10	0	87	0	0	0
총계	2,654	310	195	0	0	0	43	15	0	247	0	1844	0

❍ 특별과업

구분	총계	UPS점검	낙뢰방지기 점검	제어기 점검 및 청소
5월	144	3	0	141
6월	113	3	0	110
누계	257	6	0	251
총계	280	12	8	260

❍ 데이터관리 현황(온라인 율 %)

구분	1회(3, 4월)	2회(5, 6월)
5월	98.51	98.69	온라인율 평균	98.62
6월	98.63	98.65
누계	98.57	98.67
총계	98.57	98.67

❍ 기타사항 : 첨부1「제2회 업무추진실적」참조

□ 검사결과 : 적합

□ 기성내역

❍ 제2회 부분준공금액 : 금103,403,950원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
610,781,800	103,512,110	103,403,950	206,916,060	403,865,740

※ 산출근거 : 첨부2「제2회 기성금산출내역」

첨부: 1. 기성 업무추진실적 1부.

2. 기성 산출내역 1부.

3. 기성 점검표 및 검수사진 각 1부

4. 기성 근무상황부 1부.

5. 기성 유류사용내역 1부. 끝.