문서번호	급수운영과-15031
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박홍선		07/21 최임봉
협 조
	주무관			공문수
	주무관			박종태
	주무관			이재윤
	주무관			윤복철

설계변경 심의 의견서

(역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

강남수도사업소

급수운영과

설계변경 심의 의견서

❍ 공 사 명 : 역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	주무관 박 홍 선
심의일시	2014. 7. 21(월)

❍ 심의위원회 의견

- 심의일시 : ‘14.07.21(월) 11:00~12:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과를 아래와 같이 의견 제시함

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	급수운영과장	적정함	최 임 봉
위 원	급수운영과 주무관	타당함	공 문 수
위 원	급수운영과 주무관	타당함	박 종 태
위 원	시설관리과 주무관	적정함	이 재 윤
위 원	시설관리과 주무관	적정함	윤 복 철

설계변경 요약 보고

공사현황

〇 공 사 명  : 『역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사』

〇 공사개요  : 당초- D=20~400mm, L=1,844m

변경- D=20~400mm, L=1,810m(감34m)

〇 도 급 비  : 당초- 486,301,510원

변경- 453,200,000원

〇 공사기간  : 2014. 3. 24. ∼ 2014. 7. 21

〇 시 공 사  : 유림환경(주) 대표 최용우

〇 예산과목  : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(세척갱생관정비)

설계변경사유

〇 공사시점부분이 지하철복공판으로 되어있어 금회 공사에서 타절

․ 차병원 사거리 D=900/300mm 부단수분기 및 D=300mm, L=30m 관부설 타절

→ 관련근거 : 공사감독2처-10295(2014.07.02.)호

〇 건강보험료, 노인장기보험료, 연금보험료 납부 자료에 의한 실정산

〇 건설하도급 수수료 정산

〇 기타 시공 수량 증감으로 인한 정산

〇 설계변경 개요

공 종	단위	당초	변경	증,감
D=20~400mm 부설	m	1,844	1,810	감 34
밸브실 설치	개소	41	41	-

○ 주요공정 검토현황

구 분	검 토 내 용	검토결과	비고
1. 토공	아스팔트깨기(소형브레이커,야간)외 48종	이상없음
2. 부설공	주철직관부설공(300mm,야간)외 132종	〃
3. 구조물공	원형밸브실 설치공(80mm,야간)외 18종	〃
4. 부대공	콘테이너 가설창고외 61개소	〃
5. 기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	〃

○ 공사비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,069,706,510	1,069,706,510	-
도 급 비	486,301,510	453,200,000	(감)33,101,510
관 급 비	246,030,000	234,190,000	(감)11,840,000
도로복구비 및 기타	337,375,000	382,316,510	(증)44,941,510

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증 1부.  끝